한국철도시설공단

Q. 철도공사 지연 문제에 대하여

한국철도시설공단이 제출한 자료중 2002년 이후 2005년 6월까지 철도공사 지연 현황에 따르면,

충남지역과 관련된 지연 현황이 전체 지연공사 10건 중 8건이고, 평균 지연일수는 612.5일로 나타났음

<철도공사 지연현황 (2002년 ～2005년 6월)>

공사명	공사 지연일	공사지연 사유
장항선(천안~온양온천간) 복선전철 노반개량공사	748	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
장항선(온양온천~장항간) 제1-1공구 노반개량공사	782	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
장항선(온양온천~장항간) 제1-2공구 노반개량공사	780	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
장항선(온양온천~장항간) 제2-1공구 노반개량공사	420	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
장항선(온양온천~장항간) 제2-2공구 노반개량공사	420	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
장항선(온양온천~장항간) 제3공구 노반개량공사	660	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
장항선(온양온천~장항간) 제4공구 노반개량공사	566	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
장항~군산간 철도연결 노반신설공사	524	년도별 소요예산 부족으로 공기연장 (‘06→’08)
경부선 옥천~지탄간 일부 선형개량 노반공사	365	하천 정비계획 수립에 따른 진평천교 재설계 등 현장 여건 변동으로 인한 준공기한 연장
경부선 황간~추풍령간 일부 선형개량 노반공사	380	본선 교차구간인 기존고속도로 철거 예정기간 연장

Q.공사지연사유를 보면 충남지역에 해당하는 경우는 모두 ‘소요예산부족’    으로 나와 있는데 유독 충남지역 공사에만 예산이 부족하게 편성된    특별한 이유가 있는지?

Q.또한 공사지연대책을 보면 ‘년도별 적정예산 편성시 장비 및 인원을    추가 투입하여 공정만회’와 ‘2005년도 계속비사업 지정으로     계획공기내 완료계획’이라고 되어 있는데 공정만회 현황과     계속비사업 지정은 현재 어떻게 되고 있고 공사의 완료에는 차질이    없는지?