서남해안 일주도로(국도 77호선) 확장사업 지지부진

국도 승격 이후 4년 동안 완료 구간 한곳도 없고 확장공사도 전체 구간의 8.5%만 이루어져

“현재까지 진행속도로는 개통구간 495.8km 확장에 산술적으로 94년 걸려”

1. 서남해안 일주도로(국도77호선)가 국도로 승격된지 4년이 지났음에도 확장공사 등 일주도로망 구축을 위한 후속작업이 제대로 이루어지지 않고 있다.(별첨1 참조)

- 2001년 8월 25일 국도 승격 이후 2005년 10월 현재까지 확장공사가 완료된 구간은 한곳도 없으며,

- 확장공사 중인 구간도 전체 개통구간 495.8km(12개 구간) 가운데 8.5%인 42.2km(9개 구간)에 불과하다.

(익산지방국토관리청장에게)

☞ 지금의 사업진행 속도라면 현재 개통구간 495.8km를 모두 확장하는데 산술적으로 94년이 걸리는 것으로 계산된다.(현재 확장공사 중인 42.2km 완료에 8년 소요, km당 5.3년, 별첨2 참조)

호남선이 복선화(대전~목포, 252.5km)되는데 35년(1968~2003)이 걸렸다. 서남해안 일주도로도 호남선 복선화 사업의 전철(前轍)을 밟을 생각인가?

※ 호남선 복선화 사업(대전~목포, 1968~2003)

대전~익산(87.9km, 1968~1977), 익산~정읍(43.5km, 1981~1985), 정읍~송정리(54.3km, 1982~1988), 송정리~목포(66.8km, 1995~2003)

☞ 낙후지역 개발과 관광산업 육성을 위해 서남해안 일주도로가 국도로 승격되었다는 점을 감안한다면 보다 빨리 사업을 진행해야 하지 않겠나?

☞ 아울러, 서남해안 일주도로 전체 644km 가운데 미시행(미개통, 도로가 없는 구간) 구간도 106km나 된다. 현재 개통된 구간을 모두 확장하더라도 이어지지 않는다면 의미가 없다. 미개통 구간도 조속히 완공해야 하지 않겠나?

<별첨1>

서남해안 일주도로(국도77호선) 현황

구분		연 장	공용중	확장 공사중	미시행
1	경남도계-둔덕	15.0	14.0	-	1.0
2	둔덕-주삼	8.2	-	8.2	-
3	종화-우두	1.9	-	1.9	-
4	우두-돌산	13.8	13.8	-	-
5	돌산-화태	4.0	-	4.0	-
6	화태-개도	11.4	-	-	11.4
7	개도-적금	32.2	9.7	-	22.5
8	적금-영남	3.1	-	3.1	-
9	영남-녹동	64.3	64.3	-	-
10	녹동-고흥	18.9	18.9	-	-
11	고흥-보성	59.0	59.0	-	-
12	보성-신지	83.5	82.5	-	1.0
13	신지-완도	2.4	-	2.4	-
14	완도-문내	100.7	100.7	-	-
15	문내-압해	54.1	39.4	-	14.7
16	압해-운남	6.4	-	6.4	-
17	운남-망운	9.6	-	9.6	-
18	망운-현경	3.8	-	3.8	-
19	현경-해제	18.0	18.0	-	-
20	해제-영광	10.4	8.6	-	1.8
21	영광-도계	123.3	66.9	2.8	53.6
계		644.0	495.8	42.2	106.0

자료: 익산지방국토관리청

<별첨2>

서남해안 일주도로 확장공사 구간 현황

구분	사업명	사업구간	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비고
1	둔덕-종화	여수시 종화동 ～여수시 둔덕동	L=8.2km B=20m	178,590	‘99. 12. 28 ～‘06. 12. 31	7년
2	종화-우두	여수시 돌산읍 우두리 ～여수시 수정동	L=1.94km B=20m	74,370	‘05. 8. 12 ～‘10. 12. 31	5년
3	돌산-화태	여수시 돌산읍 신복리 ～여수시 남면 화태리	L=3.98km B=14m	136,257	‘04. 10. 26 ～‘09. 10. 25	5년
4	적금-영남	여수시 화정면 적금리 ～고흥군 영남면 우천리	L=3.1km B=15.5m	205,000	‘04. 11. 1 ～‘10. 3. 5	6년
5	신지-완도	완도군 완도읍 가용리 ～완도군 신지면 강독리	L=2.36km B=15.5m	80,448	‘97. 10. 25 ～‘05. 12. 31	8년
6	압해-운남	신안군 압해면 복룡리 ～무안군 운남면 연리	L=6.4km B=20m	114,425	‘03. 6. 25 ～‘11. 6. 24	8년
7	운남-망운	무안군 운남면 연리 ～무안군 망운면 목서리	L=9.6km B=20m	64,300	‘05. 12 (착수예정) ~‘10.12	6년
8	망운-현경	무안군 망운면 목서리 ～무안군 현경면 외반리	L=3.8km B=20m	46,795	‘02. 12. 30 ～‘05. 12. 29	3년
9	변산우회	부안군 변산면 마포리 ～부안군 변산면 지서리	L=2.77km B=20m	23,637	‘02. 11. 22 ～‘07. 10. 27	5년

자료: 익산지방국토관리청