	報道資料 2006. 10. 23(월) 전주지방환경청	국회환경노동위원회 http://www.cleanjun.com ✉ masan-jun@hanmail.net Tel. (02) 788-2916 Fax. (02) 788-3603 국회의원회관 603호
국회의원 안 홍 준 (한나라당, 마산 乙)

용담댐 수질오염방지 대책 보완 필요

○ 각 기관․단체에서 용담댐 수질보전대책을 세부 추진계획에 따라 추진하여 용담댐의 수질이 해마다 개선(＇02년 : COD 3.5㎎/ℓ→ '05년 2.6㎎/ℓ)되고 있는 추세이나, 당초 계획 수립시 예측 수질(＇06년 : COD 1.8㎎/ℓ)에는 미치지 못하여 연동대책 수립 등을 통한 대책의 보완이 요구됨

○ 용담댐 수질보전대책의 보완을 위하여 추진실적 등을 토대로 3년마다 연동대책을 수립하여 환경부의 승인을 받아야 하나 연동대책 수립․승인이 지연

○ 특히 진안군, 장수군, 무주군의 경우, 하수도정비기본계획이 수립되지 않았고, 마을하수도 설치의 경우 당초 계획에 따르면 총 74개소를 설치하겠다고 하였음에도 21개만 설치되었으며,  2005년도에는 진안군만이 2개소 설치한 것에 그쳤습니다.

○ 또한 하수처리구역 확대, 불명수 유입방지, 유입수질 제고 등 하수처리시설 설치효과를 높이기 위하여는 하수관거 정비가 필수적이나, 장수군, 무주군의 경우 총 123㎞중 57.5㎞정비에 그쳐 당초계획 대비 추진이 매우 미흡

○ 진안, 장계, 무주 등 중심하수처리장의 유입수질이 설계유입 수질보다 훨씬 낮아(50%미만) 하수관거 정비사업이 시급하므로 하수관거정비사업 조속히 추진할 필요