꿈과 희망 심 재 철	보도자료 (2006. 10. 31)	TEL:02) 788-2566, 784-4164 FAX:02) 788-3201 www.cleanshim.com cleanshim@assembly.go.kr

토공, 5년간 설계변경으로 사업비 8,241억 증액

- 100억 이상 증액된 사업만도 33.3%

- 6건은 본 사업비보다 더 많이 증액

지난 5년 동안 한국토지공사는 총 공사비 100억원이상 84건의 사업에 대해 1,024회의 설계변경을 통하여 8,241억원의 사업비를 증액한 것으로 드러났다.

한국토지공사가 국회 건설교통위원회 심재철 의원(한나라당, 안양 동안을)에게 제출한 국정감사 자료에 의하면, 지난 5년 동안 사업비가 증액된 84건에 대한 최초 낙찰가는 2조 5,123억원이었지만 총 1,024회의 설계변경을 통하여 낙찰가보다 8,241억원(32.8%)이나 증액된 것으로 나타났다.(첨부자료 참조)

특히 100억원 이상 사업비가 증액된 사업만도 33.3%인 28건에 이르고 있으며, 당초 낙찰가보다 더 많이 증액된 사업도 6건이나 되었다.

증액된 사업비 8,241억원 중 19.5%인 1,605억원만이 물가변동에 따른 증가액이 며, 나머지 80.5%인 6,635억원이 물가변동 이외의 사유로 인하여 증액된 금액이다.

1,024회의 계약금액 조정요인으로는 △현장여건 반영 25.0%, △물가변동 반영 15.1%, △기타 11.2%, △인허가조건 반영 9.1%, △추가공사 시행 8.0%, △ 설계오류 수정 7.5%, △지자체요구 반영 7.1% 등의 순서로 나타났다.

또한 당초 낙찰가보다 더 많이 증액된 사업은 △김포장기지구 택지개발사업 조성공사(207억→417억), △용인동백지구 택지개발사업 조성공사 1공구(208억→586억), △용인동백지구 택지개발사업 조성공사 2공구(170억→777억), △국가지원지방도 23호선(마북~신갈) 도로확장 및 신설공사(100억→257억), △광주신창지구 택지개발사업 조성공사 1공구(243억→762억), △양산물금지구 하천개수공사 1-4공구(125억→433억)이다.

<< 계약금액 조정요인 >>

계약금액 조정요인	변경횟수	비율(%)
현장여건반영	256	25.0
물가변동반영	155	15.1
기타	115	11.2
인허가조건반영	93	9.1
추가공사시행	82	8.0
설계오류수정	77	7.5
지자체요구반영	73	7.1
방침변경	67	6.6
민원반영	58	5.7
공법변경	48	4.7
총 계	1,024	100.0

(자료 : 한국토지공사 국정감사자료)

심의원은 “물가변동액 이외의 사유로 설계변경된 금액이 6천억이 넘는다는 것은 공개입찰의 의미를 무색케 하는 행위이다”고 지적하며, “토공은 설계변경에 따른 사업비 증액에 대한 관리감독을 더욱 철저히 할 것”을 촉구하였다.

2006. 10. 31

국 회 의 원   심 재 철

[첨부자료]

<< 최근 5년간 설계변경내역 >>

부서명	공 사 명	시공업체	착공일	준공일 (예정일)	최초 도급액 (백만원)	규모 (천평)	금액 조정 회차	변경일 (년/월/일)	변경후 공사비 (백만원)	회차별 증감액 (백만원)	증감액 (백만원)	비고
경기 지역본부	용인신봉,동천 택지개발사업 조성공사	현대건설㈜	00/06/30	03/12/31	29,477	264	1차	01/07/25	30,062	585	6,757
							2차	01/12/20	30,263	202
							3차	02/12/24	32,300	2,037
							4차	03/02/19	32,859	559
							5차	03/06/11	35,368	2,509
							6차	03/12/01	43,191	7,823
							7차	03/12/24	36,223	-6,958
경기 지역본부	시흥능곡지구 택지개발사업 조성공사	㈜KCC건설	05/02/21	07/10/20	26,602	299	1차	06/04/24	26,672	70	1,254
							2차	06/05/29	27,856	1,184
행정중심 복합도시 건설기획처	행정중심복합도시 홍보관 및 사옥 등 건립공사	동명종합건설㈜	05/10/04	06/12/15	11,107	지상2층	1차	05/12/28	12,176	1,069	2,944
							2차	06/06/08	14,051	1,875
판교사업단	성남판교지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	㈜삼성물산	05/06/30	08/12/28	53,042	647	1차	06/02/21	53,690	648	648
평택지사	평택장당지구 택지개발사업 조성공사	㈜상원건설	02/10/24	05/06/10	8,080	117	1차	03/03/20	8,797	717	6,374
							2차	03/10/17	9,162	365
							3차	04/01/09	11,216	2,054
							4차	05/01/17	14,101	2,885
							5차	05/06/03	14,454	353
남양주 지사	남양주평내지구 택지조성공사	선암산업개발㈜	00/11/04	04/07/31	19,021	257	1차	01/03/22	19,548	527	2,657
							2차	02/07/31	19,970	422
							3차	02/12/05	19,750	-220
							4차	03/06/20	20,135	385
							5차	03/11/26	20,503	368
							6차	04/07/30	21,678	1,175
남양주 지사	남양주마석지구 택지조성공사	중흥건설㈜	99/12/20	02/10/06	12,406	143	1차	01/05/21	12,985	578	1,578
							2차	01/10/26	13,025	40
							3차	02/06/18	13,241	217
							4차	02/10/02	14,059	818
							5차	02/10/04	13,984	-75
남양주 지사	남양주호평지구 택지조성공사	한라건설㈜	01/03/05	07/12/31	27,386	330	1차	01/12/28	29,543	2,157	12,880
							2차	02/06/26	30,377	834
							3차	02/12/17	31,605	1,228
							4차	04/04/20	32,801	1,196
							5차	04/11/05	33,594	793
							6차	04/12/28	38,826	5,232
							7차	05/09/28	39,183	357
							8차	05/12/21	39,501	318
							9차	06/04/18	40,266	765
경남 지역본부	김해진영지구 택지개발사업 조성공사	중흥건설㈜	02/05/03	06/12/31	40,100	192	1차	03/03/28	43,043	2,943	8,706
							2차	03/05/29	43,395	352
							3차	04/07/14	47,793	4,398
							4차	05/03/18	48,915	1,122
							5차	05/10/06	49,275	360
							6차	05/12/07	48,676	-599
							7차	06/03/29	48,806	130
경남 지역본부	김해율하지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	대림산업㈜	04/07/23	07/03/09	21,906	290	1차	05/06/24	22,949	1,043	1,495
							2차	05/12/26	23,401	452
경남 지역본부	김해율하지구 택지개발사업 조성공사(2공구)	㈜포스코건설	04/07/23	07/03/09	25,614	307	1차	05/09/05	26,229	615	615
충북 지역본부	제천지방산업단지 개발사업 조성공사	㈜원건설 건축사사무소	01/10/22	04/10/15	19,680	357	1차	02/12/13	21,379	1,699	7,828
							2차	03/08/25	23,498	2,119
							3차	03/12/22	26,921	3,423
							4차	04/10/05	27,508	587
충북 지역본부	청주산남3지구 택지개발사업 조성공사	㈜대보건설	03/12/29	06/12/28	23,542	340	1차	04/08/10	24,600	1,058	16,758
							2차	05/01/12	25,733	1,134
							3차	05/05/12	29,659	3,926
							4차	05/11/01	32,320	2,661
							5차	05/12/22	33,893	1,573
							6차	06/06/07	40,299	6,406
충북 지역본부	청주강서1지구 택지개발사업 조성공사	삼성중공업㈜	04/12/31	07/12/30	22,043	203	1차	06/01/20	23,118	1,075	1,075
충북 지역본부	오송생명과학단지 조성공사(1공구)	㈜대원	03/07/28	06/07/11	31,973	715	1차	03/12/10	33,173	1,200	10,067
							2차	05/01/18	38,049	4,876
							3차	06/06/23	42,040	3,991
충북 지역본부	오송생명과학단지 조성공사(2공구)	㈜대원외 2개사	03/07/28	07/06/30	21,668	686	1차	04/01/14	22,007	339	5,362
							2차	05/01/18	27,030	5,023
충북 지역본부	오송생명과학단지 특수구조물시설공사	㈜원건설	04/11/01	06/09/22	13,779	-	1차	05/12/28	13,996	217	217
화성지사	화성발안 지방산업단지 개발사업 조성공사	㈜삼호	02/09/04	05/05/31	31,220	558	1차	03/03/12	34,803	3,583	17,539
							2차	03/06/23	39,803	5,000
							3차	03/12/19	42,099	2,296
							4차	04/09/20	44,765	2,666
							5차	04/12/21	47,900	3,135
							6차	05/05/23	48,759	859
화성지사	화성발안 폐수종말처리 시설공사	대림산업㈜	04/01/19	05/09/10	10,478	3,000 톤/일	1차	04/06/24	11,041	563	1,507
							2차	05/04/26	11,985	944
화성지사	화성동탄지구 택지조성공사 (시범단지)	대보건설㈜	03/03/31	06/09/29	26,020	406	1차	04/06/24	27,308	1,288	18,203
							2차	05/01/12	32,477	5,169
							3차	05/08/04	44,224	11,746
화성지사	화성동탄지구 택지조성공사 (1공구)	㈜KCC건설	03/06/30	06/12/30	36,974	844	1차	04/11/24	38,536	1,562	26,388
							2차	05/06/24	47,373	8,837
							3차	05/12/20	57,032	9,658
							4차	06/02/28	57,077	45
							5차	06/06/23	63,363	6,286
화성지사	화성동탄지구 택지조성공사 (2공구)	㈜포스코건설	03/06/30	06/12/30	35,911	848	1차	04/09/17	38,289	2,378	20,457
							2차	05/12/20	56,305	18,016
							3차	06/03/06	56,368	63
화성지사	화성동탄지구 택지조성공사 (3공구)	㈜남양건설	03/09/30	06/09/29	37,584	636	1차	04/11/30	40,681	3,097	16,717
							2차	05/07/26	50,908	10,227
							3차	05/12/21	51,454	545
							4차	06/06/27	54,302	2,848
화성지사	화성동탄지구 택지조성공사 (특수구조물)	진흥기업㈜	05/02/21	06/10/18	42,023	지하차도2, 교량6개소	1차	04/09/17	42,849	826	850
							2차	06/03/21	42,873	24
화성지사	동탄~수원간 도로건설사업(1공구)	동광건설㈜	05/03/31	07/03/30	41,294	2.24km	1차	05/09/08	42,084	790	790
화성지사	화성향남지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	쌍용건설㈜	05/07/28	08/03/13	20,509	304	1차	05/12/22	20,509	506	506
화성지사	화성향남지구 택지개발사업 조성공사(2공구)	㈜남흥건설	05/07/28	08/03/13	16,833	209	1차	06/05/19	16,927	94	94
영동지사	동해해안지구 택지개발사업 조성공사	대창건설㈜	04/03/02	06/11/16	16,275	123	1차	01/08/31	16,628	353	2,260
							2차	05/10/28	17,520	891
							3차	05/12/26	18,515	995
							4차	06/03/27	18,536	21
인천 지역본부	부천상동지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	쌍용건설㈜	99/04/15	03/03/20	32,793	319	1차	99/10/06	35,109	2,316	18,870
							2차	00/12/27	43,974	8,865
							3차	01/09/21	45,220	1,246
							4차	01/12/27	46,641	1,421
							5차	02/06/24	47,333	692
							6차	02/09/27	50,784	3,451
							7차	02/11/27	51,663	879
인천 지역본부	부천상동지구 택지개발사업 조성공사(2공구)	보성건설㈜	99/06/05	02/12/09	16,213	183	1차	99/12/24	16,766	553	10,662
							2차	00/12/26	24,987	8,221
							3차	01/21/19	25,862	875
							4차	02/09/13	27,486	1,624
							5차	02/12/05	26,875	-611
인천 지역본부	부천상동지구 택지개발사업 조성공사(3공구)	삼성엔지니어링㈜	99/06/17	02/12/07	16,014	264	1차	00/06/19	16,775	761	6,371
							2차	00/12/16	17,305	530
							3차	01/12/19	19,829	2,524
							4차	02/08/02	21,832	2,003
							5차	02/12/05	22,385	553
인천 지역본부	부천상동지구 택지개발사업 조성공사(4공구)	케이씨씨건설㈜	99/06/05	02/12/09	16,670	180	1차	00/12/16	17,471	801	3,323
							2차	01/09/25	18,141	670
							3차	01/12/21	18,909	768
							4차	02/09/27	19,491	582
							5차	02/12/05	19,993	502
인천 지역본부	인천지사사옥 신축(건축,기계)공사	㈜흥건사	02/10/31	05/05/31	17,138	연면적5.4	1차	03/07/11	17,957	819	5,014
							2차	03/09/02	18,302	345
							3차	03/12/22	19,948	1,647
							4차	04/09/10	20,442	494
							5차	04/12/27	20,676	234
							6차	05/05/31	22,156	1,480
							7차	05/05/31	22,151	-5
인천 지역본부	김포장기지구 택지개발사업 조성공사	㈜신안	04/01/05	08/03/24	20,747	265	1차	05/07/04	24,812	4,065	20,980
							2차	06/03/24	41,728	16,915
개성사업처	개성공단(1단계) 개발사업 조성공사 (토공사,공통공사)	㈜현대아산	04/04/23	06/07/11	25,835	1,000	1차	05/06/17	26,832	997	8,556
							2차	05/08/08	27,377	545
							3차	05/12/02	35,218	7,841
							4차	06/05/16	34,391	-827
개성사업처	개성공단(1단계) 개발사업 조성공사 (도로포장공 외 공통공사)	㈜현대아산	04/08/30	07/05/20	24,786	1,000	1차	05/06/17	26,220	1,434	1,434
용인지사	용인동백지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	강산건설㈜	02/10/24	06/04/30	20,795	545	1차	03/01/15	24,650	3,855	37,755
							2차	03/05/28	25,702	1,052
							3차	03/11/24	45,973	20,271
							4차	04/11/25	51,074	5,101
							5차	05/10/17	58,550	7,476
용인지사	용인동백지구 택지개발사업 조성공사(2공구)	계룡건설산업㈜	02/10/24	06/04/30	16,960	456	1차	03/01/16	26,311	9,351	60,716
							2차	03/07/04	33,982	7,671
							3차	03/11/21	59,195	25,213
							4차	03/12/18	60,817	1,622
							5차	04/11/25	70,969	10,152
							6차	05/10/18	77,676	6,707
용인지사	동백-죽전간 도로개설공사(1공구)	현대산업개발(주)	03/06/30	05/12/29	36,021	2.716km (4차로)	1차	04/06/18	38,380	2,359	5,382
							2차	04/09/14	40,411	2,031
							3차	05/08/18	40,877	466
							4차	05/12/23	41,403	526
용인지사	동백-죽전간 도로개설공사 (2공구)	㈜효자건설	03/06/30	05/12/29	22,868	1.264km (4차로)	1차	04/10/01	26,665	3,798	4,645
							2차	05/06/14	27,369	703
							3차	05/12/27	27,513	144
용인지사	동백-연수원간 도로개설공사	극동건설㈜	03/06/30	05/12/29	23,743	1.640km (6차로)	1차	04/12/14	26,633	2,890	4,199
							2차	05/09/09	27,832	1,199
							3차	05/12/23	27,942	110
용인지사	삼막곡-연수원간 (대3-26) 도로건설사업 조성공사	신성건설㈜	03/06/30	05/12/29	51,639	3.28km (6차로)	1차	04/11/25	61,475	9,836	16,436
							2차	05/12/12	76,559	15,084
							3차	05/12/23	68,075	-8,484
용인지사	용인죽전지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	현대산업개발(주)	01/02/09	04/12/29	68,961	465	1차	02/07/24	71,496	2,535	18,627
							2차	03/03/25	73,992	2,496
							3차	04/06/08	74,660	668
							4차	04/12/28	87,588	12,928
용인지사	용인죽전지구 택지개발사업 조성공사(2공구)	현대건설㈜	01/02/09	04/12/29	77,949	590	1차	02/07/24	102,492	24,543	58,696
							2차	02/09/06	104,641	2,149
							3차	03/03/25	108,676	4,035
							4차	04/05/14	109,555	879
							5차	04/12/28	136,645	27,090
용인지사	용인 풍덕천사거리 입체화(고가차도) 시설 설치공사	성원산업개발㈜	02/03/22	05/12/31	13,623	고가차도 등 1식	1차	03/01/16	18,605	4,982	11,942
							2차	04/06/14	24,754	6,149
							3차	04/11/30	24,884	130
							4차	05/06/28	25,774	889
							5차	05/12/27	25,566	-208
용인지사	국가지원지방도 23호선(마북~신갈) 도로확장 및 신설공사	금광기업㈜	00/09/14	04/10/31	10,049	2.647㎞ (확장6차선 신설4차선)	1차	01/12/18	18,076	8,026	15,686
							2차	02/07/26	19,633	1,557
							3차	03/05/06	20,403	770
							4차	03/07/03	20,621	218
							5차	03/09/03	21,674	1,052
							6차	04/03/23	23,455	1,781
							7차	04/10/28	25,737	2,282
용인지사	용인흥덕지구 주변 도로(흥덕~구갈간) 개설공사	㈜신일건업	05/03/30	07/09/31	19,701	1.62㎞(신설 4차선)	1차	05/09/06	20,478	777	777
광주전남 지역본부	광주신창지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	남양건설㈜	01/12/22	06/12/31	24,329	330	1차	02/10/14	25,734	1,405	51,888
							2차	02/12/28	51,110	25,377
							3차	03/12/16	55,844	4,734
							4차	04/05/06	57,447	1,603
							5차	04/09/09	57,447	0
							6차	04/11/29	72,713	15,266
							7차	05/11/23	76,216	3,503
광주전남 지역본부	광주수완지구 택지개발사업 조성공사(2공구)	㈜보성건설	04/10/14	07/07/12	23,801	351	1차	06/06/22	27,919	4,117	4,117
광주전남 지역본부	광주수완지구 택지개발사업 조성공사(3공구)	코오롱건설㈜	04/10/14	07/7/12	18,984	352	1차	06/06/26	20,684	1,700	1,700
광주전남 지역본부	광주전남지역본부 사옥 신축(건축)공사	㈜현대건설	05/06/21	07/12/20	21,313	6.6	1차	05/12/10	21,352	39	49
							2차	06/02/21	21,362	10
전북 지역본부	군장국가산업단지 군산지구 조성공사(1공구)	㈜대우건설	96/09/09	03/06/30	37,950	601	1차	97/12/21	37,369	-581	9,613
							2차	98/12/10	39,861	2,492
							3차	98/12/23	40,747	886
							4차	00/12/14	42,387	1,640
							5차	01/08/27	41,845	-542
							6차	02/08/23	45,260	3,414
							7차	02/12/30	45,609	349
							8차	03/02/17	46,305	696
							9차	03/05/07	46,461	156
							10차	03/06/30	47,564	1,103
전북 지역본부	군장국가산업단지 군산지구 조성공사(2공구)	LG건설㈜	97/07/18	04/12/22	70,470	591	1차	98/07/25	71,073	603	23,274
							2차	00/09/22	88,148	17,074
							3차	00/11/24	81,671	-6,477
							4차	02/01/04	81,695	24
							5차	02/08/20	80,596	-1,099
							6차	02/12/10	83,849	3,253
							7차	03/04/28	91,067	7,218
							8차	04/05/21	93,305	2,238
							9차	04/12/08	93,745	440
전북 지역본부	군장국가산업단지 군산지구 조성공사(3공구)	보성건설㈜	00/05/03	04/07/31	62,250	765	1차	02/11/04	59,822	919	7,210
							2차	02/12/17	63,295	3,473
							3차	03/12/23	65,281	1,986
							4차	04/07/26	66,113	832
전북 지역본부	군장국가산업단지 군산지구 조성공사(5공구)	㈜한진중공업	01/12/13	05/11/29	62,747	633	1차	03/09/16	63,994	1,246	3,047
							2차	03/12/23	62,557	-1,438
							3차	04/05/21	64,781	2,224
							4차	04/12/23	65,439	658
							5차	04/07/14	65,756	317
							6차	05/11/21	65,796	40
전북 지역본부	군장국가산업단지 군산지구 조성공사(6공구)	현대건설㈜	00/04/14	05/06/30	68,776	838	1차	01/01/08	65,093	-3,683	16,698
							2차	04/04/24	67,283	2,190
							3차	02/05/20	67,517	234
							4차	02/09/13	76,305	8,788
							5차	03/04/23	80,440	4,135
							6차	03/10/28	81,154	714
							7차	04/05/14	84,838	3,684
							8차	04/11/16	85,588	750
							9차	05/06/23	85,476	-114
전북 지역본부	군장국가산업단지 군산지구 조성공사(7공구)	계룡건설산업㈜	01/12/13	05/12/12	38,026	522	1차	02/09/02	39,834	1,808	9,012
							2차	03/03/19	40,210	375
							3차	03/07/24	42,049	1,839
							4차	03/12/17	44,594	2,546
							5차	04/06/23	45,600	1,006
							6차	04/12/09	46,497	897
							7차	05/09/09	46,883	385
							8차	05/12/07	47,039	156
전북 지역본부	군산수송지구 택지개발사업 조성공사	코오롱건설㈜	04/04/19	07/01/26	19,982	166	1차	04/12/20	21,642	1,660	2,781
							2차	05/12/23	22,506	864
							3차	06/03/31	22,762	257
전북 지역본부	군산수송2지구 택지개발사업 조성공사	대우자동차 판매㈜	04/04/19	07/01/26	22,377	206	1차	04/12/15	23,250	873	2,029
							2차	05/12/23	24,406	1,156
대전충남 지역본부	대전가오지구 택지개발사업 조성공사	㈜효자건설	03/02/25	06/05/31	21,038	195	1차	03/12/15	21,288	250	6,806
							2차	05/03/11	22,284	996
							3차	05/12/12	22,509	225
							4차	06/02/24	27,232	4,723
							5차	06/05/26	27,845	612
대전충남 지역본부	대전노은지구 서측연결도로 개설사업	성원건설㈜	05/01/06	07/01/05	21,922	도로1.4km	1차	05/12/26	20,286	-1,636	-1,636
대구경북 지역본부	왜관지방산업2단지 개발사업 조성공사	㈜대아건설	02/09/26	05/06/12	13,371	223	1차	03/12/18	14,147	780	1,723
							2차	04/12/13	14,998	851
							3차	05/06/08	15,090	92
대구경북 지역본부	포항4일반 지방산업단지 조성공사(1공구)	㈜대우건설	03/07/16	06/02/15	25,690	311	1차	03/12/18	26,735	1,045	5,334
							2차	04/07/23	28,553	1,818
							3차	04/11/22	29,855	1,302
							4차	05/12/28	31,154	1,299
							5차	06/02/13	31,024	-130
대구경북 지역본부	포항4일반 지방산업단지 조성공사(2공구)	울트라건설㈜	03/07/16	06/02/15	22,035	315	1차	03/12/18	22,982	947	2,852
							2차	04/07/23	24,309	1,327
							3차	04/11/22	24,706	397
							4차	05/12/28	25,501	795
							5차	06/02/13	24,887	-614
대구경북 지역본부	경산서부백천지구 택지개발사업 조성공사	남흥건설㈜	01/05/11	03/08/30	12,466	99	1차	02/11/14	12,719	253	1,015
							2차	03/08/20	13,481	762
대구경북 지역본부	경산사동2지구 택지개발사업 조성공사	금호산업㈜	05/05/10	07/10/10	34,962	278	1차	06/06/20	37,079	2,117	2,117
서울 지역본부	의정부송산지구 도시계획시설사업 (대1-8,대2-6호선) 개설공사	경남기업㈜	01/10/10	04/04/29	9,460	114	1차	03/04/21	9,760	300	1,802
							2차	03/07/25	10,051	291
							3차	03/12/20	10,924	873
							4차	04/04/27	11,262	338
서울 지역본부	파주교하지구 택지개발사업 조성공사 (2공구)	조원건설㈜	03/04/15	06/04/14	9,823	219	1차	03/07/11	10,687	864	8,506
							2차	04/10/13	10,936	249
							3차	05/01/21	14,692	3,756
							4차	05/12/21	18,329	3,637
서울 지역본부	파주출판문화 정보산업단지 1단계 부지조성공사	㈜현대산업개발	98/10/21	03/09/30	17,163	264	1차	00/05/26	22,503	5,340	16,088
							2차	01/04/21	23,400	898
							3차	01/07/16	27,205	3,805
							4차	01/12/19	29,337	2,131
							5차	02/12/23	32,804	3,467
							6차	03/09/03	33,251	447
서울 지역본부	양주고읍지구 택지개발사업 조성공사	삼성중공업㈜	05/06/13	08/10/12	28,673	1,484	1차	06/03/23	28,864	190	1,714
							2차	06/05/10	30,388	1,524
서울 지역본부	파주교하지구 택지개발사업 조성공사(1공구)	대림산업㈜	03/04/15	06/07/31	18,454	399	1차	03/07/29	20,419	1,965	13,216
							2차	04/12/28	20,804	385
							3차	05/01/21	25,442	4,638
							4차	05/12/21	31,670	6,228
서울 지역본부	자유로포장 및 교하~덕이간 연결도로 개설공사	화일종합건설㈜	04/10/25	06/10/24	13,201	L=12.69KM B=14~24.75	1차	05/12/26	18,851	5,650	6,997
							2차	06/05/10	20,198	1,347
부산울산 지역본부	양산물금지구 하천개수공사 (1-4공구)	보성건설㈜	97/05/22	05/10/19	12,548	175	1차	98/05/28	20,322	7,774	30,706
							2차	98/12/05	21,854	1,531
							3차	99/07/22	21,797	-57
							4차	00/12/15	29,134	7,337
							5차	02/01/03	28,163	-971
							6차	02/12/30	29,033	870
							7차	03/05/13	29,291	258
							8차	03/12/18	40,728	11,437
							9차	04/05/21	42,121	1,393
							10차	04/12/29	42,448	327
							11차	05/11/24	43,255	807
부산울산 지역본부	양산물금지구 특수구조물공사 (1공구)	고려개발㈜	98/05/07	05/12/31	46,005	교량1 지하차도2	1차	98/12/19	47,335	1,330	15,569
							2차	99/05/29	48,379	1,044
							3차	99/12/20	49,544	1,165
							4차	00/09/15	49,602	58
							5차	00/12/26	50,552	950
							6차	01/12/18	52,052	1,500
							7차	02/10/28	53,442	1,390
							8차	03/09/23	55,398	1,956
							9차	04/01/12	56,678	1,280
							10차	05/01/04	58,157	1,479
							11차	05/11/23	59,318	1,161
							12차	05/12/22	61,574	2,256
부산울산 지역본부	부산과학지방 산업단지 조성공사	고려개발㈜	02/11/05	05/12/15	55,401	541	1차	03/09/25	58,691	3,290	9,565
							2차	04/03/30	58,838	147
							3차	04/09/17	59,789	951
							4차	04/12/29	59,865	76
							5차	05/08/26	64,270	4,405
							6차	05/12/13	64,966	696
부산울산 지역본부	울산진장유통단지 개발사업 조성공사	남양건설(주)	03/08/05	06/04/04	22,863	142	1차	05/01/10	32,508	9,644	10,471
							2차	05/12/01	33,335	827
부산울산 지역본부	양산물금지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구)	고려개발㈜	97/04/14	06/12/31	67,900	262	1차	98/12/17	58,360	-9,540	3,673
							2차	00/09/27	52,574	-5,786
							3차	01/11/14	54,187	1,613
							4차	03/03/14	55,527	1,340
							5차	03/06/20	58,451	2,924
							6차	04/06/21	63,658	5,207
							7차	05/01/04	66,377	2,719
							8차	05/11/22	71,573	5,196
부산울산 지역본부	양산물금지구 택지개발사업 조성공사 (2-2공구)	㈜서광건설산업	97/04/14	07/05/31	59,400	222	1차	99/01/12	54,203	-5,197	17,250
							2차	00/08/25	49,918	-4,285
							3차	02/05/22	52,448	2,530
							4차	03/06/30	59,573	7,125
							5차	05/03/24	68,558	8,985
							6차	05/12/21	76,650	8,092
부산울산 지역본부	양산물금지구 택지개발사업 조성공사 (2-3공구)	㈜삼호	97/04/14	07/03/31	63,734	151	1차	98/12/16	58,278	-5,456	6,795
							2차	00/08/23	51,289	-6,989
							3차	03/04/16	55,066	3,777
							4차	03/06/24	55,042	-24
							5차	03/11/25	66,731	11,689
							6차	05/01/24	68,521	1,790
							7차	05/11/15	70,529	2,008
부산울산 지역본부	양산물금지구 택지개발사업 조성공사 (2-4공구)	한일건설㈜	97/04/14	07/04/30	62,590	118	1차	98/12/28	59,166	-3,424	1,663
							2차	00/08/24	53,040	-6,126
							3차	02/10/21	53,668	628
							4차	03/06/18	56,302	2,634
							5차	05/01/24	59,701	3,398
							6차	05/12/20	64,254	4,553
부산울산 지역본부	양산물금지구 택지개발사업 조성공사 (2-5공구)	㈜태영	97/04/14	07/09/30	61,556	191	1차	98/12/17	56,573	-4,803	16,214
							2차	00/10/12	53,466	-3,287
							3차	02/08/02	54,681	1,215
							4차	03/03/28	58,935	4,254
							5차	03/10/30	70,070	11,135
							6차	04/04/12	71,896	1,826
							7차	04/12/28	74,910	3,014
							8차	05/12/12	77,770	2,860
부산울산 지역본부	양산물금지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)	성원산업개발㈜	04/09/06	08/08/17	29,124	126	1차	05/12/05	31,974	2,850	2,850
부산울산 지역본부	울산구영지구 택지개발사업 조성공사	㈜서광건설산업	03/08/07	06/08/06	28,779	220	1차	04/09/23	30,095	1,316	5,594
							2차	05/11/17	34,473	4,278
부산울산 지역본부	부산정관지방 산업단지 개발사업 조성공사	고려개발㈜	03/08/12	06/09/30	28,119	370	1차	05/01/17	29,578	1,459	3,151
							2차	05/11/23	31,270	1,692
계					2,512,334					824,050	824,050
물가변동 증감										160,522	160,522
물가변동 제외										663,528	663,528