서남해안 일주도로 7개 확장공사 구간 공사 진척도 지난 1년간 겨우 7.3%

적금~영남 2%, 운남~망운 3%, 종화~우두 5% 등

미시행 구간 106km도 1년 동안 아무런 변화 없어

1. 서남해안 일주도로(국도77호선) 7개 확장공사 구간의 지난 1년간(2005년 10월말~2006년 10월 15일) 평균 공사 진척도가 불과 7.3% 밖에 되지 않는 것으로 나타났다.

- 익산지방국토관리청이 제출한 ‘지난 1년간 서남해안 일주도로 7개 확장공사 구간 공사 진척도’를 보면

▲적금~영남(여수시 화정면 적금리~고흥군 영남면 우천리, 2.98km)이 2%로 가장 낮았으며, ▲운남~망운(무안군 운남면 연리~무안군 망운면 목서리, 9.6km) 3%, ▲종화~우두(여수시 돌산읍 우두리~여수시 수정동, 1.94km) 5%, ▲돌산~화태(여수시 돌산읍 신복리~여수시 남면 화태리, 3.98km) 6%, ▲압해~운남(신안군 압해면 복룡리~무안군 운남면 연리, 6.4km) 6%, ▲둔덕~종화(여수시 종화동~여수시 둔덕동, 8.2km) 14%, ▲변산우회(부안군 변산면 마포리~부안군 변산면 지서리, 2.77km) 15%이었다.

2. 미시행(미개통, 도로가 없는 구간) 106km(전체 구간의 16%)도 일년 동안 아무런 변화가 없었다.

- 2006년 10월 15일 현재 서남해안 일주도로 전체 644km 가운데 현재 공용(사용)중인 구간은 502.1km(78%), 공사중인 구간 35.9km(6%), 미시행 구간 106km(16%)이다.

☞ 지난해 국정감사에서 “개통구간을 모두 확장하는데 산술적으로 94년이 걸리는 것으로 계산된다. 낙후지역 개발과 관광산업 육성을 위해 조속히 사업을 진행하라”고 지적한 바 있다.

또, 미개통 구간에 대해서도 “현재 개통된 구간을 모두 확장하더라도 이어지지 않는다면 의미가 없다. 미개통 구간도 조속히 완공하라”고 지적했다.

그러나, 1년이 지난 지금 크게 달라진 게 없다. 어떻게 된 건가?

<별첨2>

서남해안 일주도로(국도77호선) 현황

(2006.10.15 현재, 단위 : km)

구 분	연 장	공용중	공사중	미시행	비 고
경남도계-둔덕	15.0	14.0	-	1.0
둔덕-종화	8.2	-	8.2	-
종화-우두	1.9	-	1.9	-
우두-돌산	13.8	13.8	-	-
돌산-화태	4.0	-	4.0	-
화태-개도	11.4	-	-	11.4
개도-적금	32.3	9.8	-	22.5
적금-영남	3.0	-	3.0	-
영남-녹동	64.3	64.3	-	-
녹동-고흥	18.9	18.9	-	-
고흥-보성	59.0	59.0	-	-
보성-신지	83.5	82.5	-	1.0
신지-완도	2.4	2.4	-	-
완도-문내	100.7	100.7	-	-
문내-압해	54.1	39.4	-	14.7
압해-운남	6.4	-	6.4	-
운남-망운	9.6	-	9.6	-
망운-현경	3.8	3.8	-	-
현경-해제	18.0	18.0	-	-
해제-영광	10.4	8.6	-	1.8
영광-도계	123.3	66.9	2.8	53.6
계	644.0	502.1	35.9	106.0

자료: 익산지방국토관리청

서남해안 일주도로 확장공사 구간현황

(2006.10.15 현재, 단위 : km)

사업명	사업구간	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	‘06.10현재 사업 진행량 (%)	‘05.10월말 사업 진행량 (%)	1년간 사업 진척도 (%)
둔덕-종화	여수시 종화동 ～여수시 둔덕동	L=8.2km B=20m	178,657	‘99.12.28 ～‘07.12.31	70	56	14
종화-우두	여수시 돌산읍 우두리 ～여수시 수정동	L=1.94km B=20m	95,500	‘05.8.12 ～‘10.12.31	5	-	5
돌산-화태	여수시 돌산읍 신복리 ～여수시 남면 화태리	L=3.98km B=14m	110,181	‘04.10.26 ～‘09.10.25	8	2	6
적금-영남	여수시 화정면 적금리 ～고흥군 영남면 우천리	L=2.98km B=15.5m	207,421	‘04.11.1 ～‘10.3.5	6	4	2
압해-운남	신안군 압해면 복룡리 ～무안군 운남면 연리	L=6.4km B=20m	114,425	‘03.6.25 ～‘11.6.24	20	14	6
운남-망운	무안군 운남면 연리 ～무안군 망운면 목서리	L=9.6km B=20m	47,947	‘06.1.3 ～‘10.12.08	3	-	3
변산우회	부안군 변산면 마포리 ～부안군 변산면 지서리	L=2.77km B=20m	20,819	‘02.11.22 ～‘07.10.27	62	47	15
계	7개구간	35.87km	774,950				7.3

자료: 익산지방국토관리청