서남해안 일주도로 교량 69.2% 지도상에 선만 그어져 있어

26개 교량중 18곳 건설 안돼…개통후 사용 3곳, 공사중 5곳

1. 국도 77호선 서남해안 일주도로 노선상에 있는 교량의 69.2%가 건설되지 않고 지도(地圖)에 선만 그어진 채 남아 있는 것으로 나타났다.

- 익산지방국토관리청이 제출한 자료에 따르면 2007년 10월 현재 서남해안 일주도로 노선상의 전체 교량은 26곳이다.

- 이 가운데 개통후 사용하고 있는 교량은 3곳(11.5%)이며 건설공사중인 교량은 5곳(19.2%)이다. 나머지 18곳(69.2%)은 지도에만 나타나 있는 미시행 구간이다.

- 전체 26개 교량의 연장은 31.6km로 개통후 사용중인 교량 8곳 1.9km(6.0%), 건설공사중인 교량 5곳 4.9km(15.5%), 미시행 교량 18곳 24.8km(78.4%)다.

- 연장 기준으로만 보면 지도에만 있는 미시행 교량구간이 78.4%나 되는 것이다.

2. 서남해안 일주도로 전체 구간으로 봐도 미시행 구간이 2005년 이후 2년 동안 하나도 줄어들지 않았다.

- 2007년 10월 현재 서남해안 일주도로 전체 연장은 644km이며 이 가운데 16.4%인 106km가 미시행 구간이다.

- 제가 국정감사에서 처음 문제를 제기한 2005년 이후 미시행 구간이 하나도 달라지지 않았다. 지금까지 기존 도로를 넓히는 확장공사만 이루어졌기 때문이다.

- 확장공사도 지난 1년간 사업진척도가 12.5% 밖에 되지 않는다.

☞ 2005년부터 국정감사 때마다 “낙후지역 개발과 관광산업 육성을 위해 조속히 사업을 진행하라”고 지적했지만 크게 달라진게 없다.

제 생전에 끊어지지 않고 모든 도로가 이어져 있는 완전한 서남해안 일주도로를 볼 수 있을지 모르겠다.

아마도 대부분의 호남인들이 저와 같은 생각을 하고 있을 것이다. 어떻게 할 건가?