보도자료 2008. 10. 7(화)	국회의원 이 정 현 (한나라당, 비례대표)	문화체육관광방송통신위 2008년 국/정/감/사 문화예술위원회
국회의원회관 445호 / 전화 : 784-5086 / 팩스 : 788-3445 / 이메일 : jhlee@na.go.kr

657억 대학로 복합공연장, 매월 전기세만 900만원씩 날려

- 공사자금 부족하자 문예기금 담보로 179억 대출까지

전문 공연장을 조성하려던 문화예술인의 숙원 사업이 “돈 먹는 하마”가 되어버렸다.

저렴한 대관료로 보다 많은 단체나 기획사에 공연 기회를 제공해 공연 예술 활성화 및 국민의 문화접근 기회 확대에 기여할 것으로 예상되었던 대학로 복합공연장은 최근 준공을 마쳤지만, 예산 부족으로 개관을 하지 못해 매월 전기세와 시설관리용역비를 허비하고 있는 것으로 드러났다. [별첨1]

문화예술위원회가 한나라당 이정현 의원에게 제출한 자료에 의하면 대학로 복합공연장은 지난 6월 30일 완공했지만 예산 부족으로 개관을 못하고 있는 실정. 이로 인해 7월에는 890만원, 8월에는 950만원 등의 전기세와 매달 960만원씩 시설관리 용역비를 지출하고 있는 실정이다.

위원회는 운영예산이 확보 되는대로 조명, 음향 등 공연장 내부시설 공사와 기자재 구입 및 공연장 운영에 필요한 시설보완(분장실 등)등을 하여 올 12월 개관, 내년 2-3월 정식 오픈할 예정이라고 밝혔다.

이 의원은 “올해는 우리나라에 연극이 시작된 지 100주년이 되는 해로 대학로 복합공연장은 연극중심극장으로 문화예술인들의 숙원사업이었지만, 개관을 못한채 혈세만 낭비하고 있다”며, “사전에 면밀한 검토 없이 추진되었기 때문에 대학로 복함문화공간 조성은 문제가 될 수 밖에 없었다”고 지적했다.

한편, 복합공연장은 당초 527억원을 예상했던 사업이었지만 잦은 설계변경 등으로 사업비가 지속적으로 추가되어  총 657억이 소요되었고, [별첨2] 이 과정에서 부족한 공사자금을 충원하고자 문화예술기금을 담보로 대출까지 받은 것이 밝혀졌다.

국회 예결위원이기도 한 이 의원은 “이번 국회 결산심의에서 분양대금을 통하여 조달하여야 할 민자사업비 176억3,800만원을 기금을 담보하여 대출받은 것에 대하여 관련자 징계 조치가 의결되었다”고 전했다.

이 의원은 “문화예술인에게 가야 할 공간이 개관을 못해 공연장으로서 기능을 하지 못하고 임대 사업자들이 차지하고 있는 현실”에 대해 문예위에 엄격한 책임규명과 대책수립을 촉구할 예정이다.

[2008년 문화예술위원회 국정감사 요구자료 답변]

[별첨1: 완공일 이후 기본운영경비 지출 내역]

지출 항목	지출금액(원)	지출일자
복합문화공간 7월 전기요금	8,912,330	2008-08-13
복합문화공간 8월 전기요금	9,530,330	2008-09-11
복합문화공간 8월 시설관리(경비,전기,기관) 용역비	9,648,980	2008-09-05
복합문화공간 9월 시설관리(경비,전기,기관) 용역비	9,648,980	2008-09-25
완공일 이후 지출 총 합 계	142,280,883

[별첨2: 대학로 복합공연장 사업변경 내용]

(단위:백만원)

구분	기금	민자	계	사업변경 발생사유
당초예산	30,500	22,260	52,760
1차변경 (05.05.04)	41,188	15,360	56,548	상가위주에서 공연장 위주로의 전면 설계변경으로 인한 기 분양자의 대량 계약해지에 따라 분양대금 및 위약금 등 필요사업비 확충
민자증액승인 (08.02.18)	41,188	24,592	65,780	- 사업인수비․공사비․강제매입비․책임감리비 등 당초 미계상 또는 과소계상 지출항목 발생 - 2차 설계변경(06.1.23)에 따른 기 분양상가의 추가 해지건 발생 - 사업기간 연장에 따른 지체상금, 이자부담 등 제비용 증가