< 2008. 10. 16  한국수자원공사 국정감사 >

수공, '08년 상수도 노후관 교체계획 4% 불과 !

- 20년경과 평가대상 노후관 700Km 중, 오염·부식으로 인한 개량대상 237Km 달해!

- 교체예산에 2,879억원 소요, 예산확보 어려워 ‘08년 교체계획은 겨우 9Km뿐!

- 노후관 39% 2013년 이후로 교체계획 미뤄, 사업완료시점 요원해!

□ 수자원공사는 수질 개선 및 누수율 감소를 위해 20년 이상 경과한 관로시설에 대한 노후도 평가 및 교체 작업 진행 중

- 2002년부터 실시한 노후관로 교체사업의 실적으로 616억원을 들여 85Km의 노후관 교체 완료

- 현재 수공이 관리하는 광역상수도 및 공업용수도 총 관로는 교체완료된 85km를 포함하여 3,942Km며 이중 20년이 경과하여 노후관으로 평가된 관로의 총길이는 700Km로 17.8% 차지

- 평가대상 관로 중 오염물질 유입이 쉽고, 부식이 생겨 각종 세균 및 미생물이 번식할 가능성이 농후한 개량대상은 237Km(33.9%)

최근 5년간 실시한 관노후도 평가 결과 (단위:km)
구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
총 관로 연장	3,504	3,635	3,770	3,772	3,942
평가대상 연장	577	617	634	656	700
개량대상 연장	51	43	78	221	237
자료 : 한국수자원공사

□ 개량대상 노후관(237Km)은 수도권1,2단계 81Km, 창원공업용수도 51Km 등으로 주로 60~70년대 설치한 공업용수도임.

* 개량대상(237km) : 수도권1,2단계(81Km, '73~'79년), 창원공업(51Km, '66~'81년), 울산공업1단계

(40Km,'62~'80년), 포항공업(18Km,'68~'80년), 거제공업(19Km,'77~'80년), 태백광역(17Km,'85~'89

년), 여천공업 등(11Km, '74~'84년)

□ 개량대상 노후관 교체시 1Km당 12.1억원의 예산 소요

- 237Km 개량대상 노후관 교체시 총 공사비는 2,879억원 소요

- 현재 시점에서 평가대상 노후관 700Km를 향후 교체시에는 8,470억원의 예산이 소요 예상

□ 막대한 예산이 투입될 것으로 예상돼 수공은 ‘08년도에 개량대상 노후관 237Km 중 3.8%에 해당되는 9km만 교체할 계획을 수립

- 2013년 이후 교체예정인 노후관만도 93Km로 전체의 40%가량을 차지

개량대상 노후관 교체계획 (단위:km)
구 분	계	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13이후
수도권1단계	81	2	17	18	17	-	27
창원공업	51	2	-	1	10	11	27
울 산	40	5	8	10	10	7	-
포항공업	18	-	-	1	2	15	-
거제공업	19	-	-	-	1	5	13
태백광역	17	-	-	-	-	1	16
여천공업등	11	-	-	-	-	1	10
전 체	237 (100%)	9 (3.8%)	25 (10.5%)	30 (12.7%)	40 (16.9%)	40 (16.9%)	93 (39.2%)
자료 : 한국수자원공사