	국감보도자료 지식경제위원회 국회의원 이종혁 한나라당 부산진을	국회의원회관 637호 전화 : 02)784-6341 2009년 10월6일(화) 지식경제부/ 경주방폐장

【경주 방폐장】보도자료 - Ⅱ

경주방폐장 건설 계획, 건국이래 최대의

황당 ․ 부실 ․ 졸속 건설계획으로 밝혀져!

- 경주방사선 폐기물 처분장 공사지연보고서(09.7)는 공기 결정이 부    지조사 결과 및 설계와는 무관하게 결정된 것으로 판명!, 사업자(한    수원), 부지조사자(현대엔지니어링), 설계자(주, 한국전력기술), 시    공자(삼성-대우)에 책임 물어야! -

지경위 한나라당 이종혁의원(부산진을)은 ‘09.10.6 지경부 국감에서, 지경부 위탁으로 진행된 동굴공사 지연(30개월 지연, ※ 23개월 → 53개월 / 추가공사비 : 700억)조사단의 조사보고서를 인용,

국민의 생명과 안전과 직결된 국가 주요 Project인 경주방폐장 건설이 부지조사결과 및 설계도가 전혀 반영되지 않고, 사업자인 한수원이 중․저준위 폐기물 포화시점에 맞춰 부실․졸속․황당하게 건설계획(공기 24개월)을 확정 했을 뿐만 아니라, 부지조사자(현대엔지니어링)는 조사와 설계 시공시의 부지 암반 상태와 전혀 상이하게 조사하였으며,

설계자(한국전력기술)는 사업자의 주어진 부실․졸속공기(24개월)에 맞추어 기본설계를 실시하고 24개월의 IPS(사업종합공정표)를 작성하였고 시공자(삼성-대우)는 처분시설의 설계도면을 보고도, 시공전문가로써 공사기간에 대한 문제점 및 건설타당성을 제기했어야 하나 이를 도외시하고, 무작정 공사 개시를 강행하는 등

경주 방폐장건설은 정부, 공기업, 민간기업의 총체적 부실 합작품으로 밝혀졌다며 즉각적인 공사 중단과 경주방폐장 Project의 전면 재검토를 촉구하였으며,

이종혁 의원은 신임 최경환 장관에게 국가 주요 국책사업의 혼선을 초래하고 국민 혈세를 낭비한 책임을 정책입안자 및 결정권자 그리고 관계기관 및 민간 기업체에 물을 것을 요구하였다.

※ 구체적인 자료 필요시 비서실로 연락바랍니다.