2010년 국정감사

한국석유공사 및 석유관리원 국정감사 보도자료

1. 특혜의혹 이라크 바지안광구 왜 이러나, 계획보다      시추기간·비용 배 이상 증가, 시추과정에선 장비까지 손실

2010. 10. 8.

국회의원 김정훈

(한나라당 부산 남구 갑)

특혜의혹 이라크 바지안광구 왜 이러나, 계획보다 시추기간·비용 배 이상 증가, 시추과정에선 장비까지 손실

2010년 한국석유공사 국정감사 보도자료 2010. 10. 8(금)

- 바지안 광구 첫 탐사시추 결과, 예상보다 소규모로 예상됨

- 바지안 광구 1차 시추기간 및 시추비용 최초 시추계획 보다 배 이상 증가

(□시추기간 4개월□10개월 / 시추비용 2천5백만불□약5천5백만불(약617억))

- 시추과정에서 4개 장비 손실, 손실액 127만8천불(약14억3천만원)에 달해

□ 현 황

□ 이라크 쿠르드 바지안 광구 1차 시공 결과

□바지안 광구의 첫 번째 탐사시추 결과 원유 및 천연가스 부존여부를 확인 함.

- 탐사시추 및 산출시험기간 :  □09.10월 ~ □10.8월

- 시추심도 : 3,847m

- 산출량 : 일산 최대 970배럴(평균 200배럴)원유 및 3백만 입방피트(원유               환산 570배럴)천연가스 산출

□ 이라크 쿠르드 바지안 광구 1차 시공 결과 확인된 원유 부존량

□한국석유공사 답변내용 : 현재로는 확인 불가

- 이라크 쿠르드지역은 파쇄대가 불규칙적으로 분포하는 파쇄 탄산염암이    주 저류층으로, 평가정을 시추해야 상업적 생산이 가능한 매장량 확인이 가능함.

- 공사는 시추 결과 정밀분석, 추가 탄성파 자료 취득 및 해석을 수행하고 2011년    하반기 예정인 추가 시추를 통해 광구 내 매장량 규모를 확인 할 계획임.

□ 이라크 쿠르드 바지안 광구 1차 시추 소요된 기간 및 시추비용 내역

구 분	시추 기간	시추 비용
최초 시추 계획	□09. 10. 01~□10. 01. 28 (4개월)	25,000천불
실제 시추	□09. 10. 01~'10. 08. 12 (10개월)	55,195천불

□ 이라크 쿠르드 바지안 광구 1차 시추 과정에서 손실 된 장비 내역

손실 된 장비	사용 용도	장비 가격
Wireline Logging Tools	물리검층	148천불
Bit	시추	18천불
Directional tools	시추 및 방향성시추	1,079천불
Fishing tools	피싱	33천불
합 계		1,278천불

□ 장비손실 비용은 시추비 초과비용에 기포함 됨.

□ 바지안광구가 위치해 있는 이라크 쿠르드 지역의 생산 유전의 일산 원유 및 천연가스 산출량

광구명	일산 원유량	일산 천연가스량	생산정 수	공당 생산량
Tawke 유전 (타우케)	5만 배럴/일	-	10공	약5천 배럴/일
Taq Taq 유전 (타크 트크)	3만 배럴/일	-	11공	약2천7백 배럴/일
Kor Mor 가스전		7천5백만 입방피트 (14,250 배럴)	확인중	-
바지안 광구				원유 970배럴 (평균 200배럴)/일

□ 출처 : 관련회사 홈페이 및 IHS energy 자료 참조

□ 문제점

□ 이라크 쿠르드 바지안 광구 예상보다 소규모일 가능성 배제 할 수 없어

□ 한국석유공사는 이라크 쿠르드 바지안 광구 1공에 대한 첫 번째 탐사결과, 일산 최대 970배럴(평균 200배럴)원유 및 3백만 입방피트(원유 환산 570배럴)천연가스가 산출될 것으로 분석하였음.

□ 同탐사에서 파악된 산출량만으로 볼 때는 인근 지역의 원유·천연가스 산출량에 비해 적어 예상보다 소규모일 가능성을 배제할 수 없음.

□ 실제 바지안 광구 주변의 Tawke(타우케) 유전, Taq Taq(타크 트크) 유전의 경우 Tawke(타우케) 유전 시추 1공당 일산 원유 약5천배럴, Taq Taq(타크 트크) 유전 시추 1공당 일산 원유 약2천7백배럴이 생산되고 있음.

□ 두 광구 1공당 생산되는 원유량은 금번에 시추한 바지안 광구 1공 평균 생산량과 비교할 때, 최대 25배에서 14배 많은 생산량임.

□ 이라크 쿠르드 바지안 광구 원유 부존량 현재로서는 확인 불가

□ 한국석유공사는 본 의원실의 질의 답변에서『이라크 쿠르드지역은 파쇄대가 불규칙적으로 분포하는 파쇄 탄산염암이 주 저류층으로, 평가정을 시추해야 상업적 생산이 가능한 매장량 확인이 가능』하다며, 현재로서는 이라크 쿠루드 바지안 광구의 원유 부존량을 확인하기 어렵다고 답변하였음.

□ 바지안 광구 1차 시추기간 및 시추비용 최초 시추계획 보다 배 이상 증가

□ 최초 한국석유공사의 이라크 쿠르드 바지안 광구시추계획(안)에서는 시추기간이 2009년 10월 1일부터 2010년 1월 28일까지 총 4개월의 기간이 소요되며, 시추비용은 2만5,000불이었음.

□ 그러나 실제 이라크 쿠르드 바지안 광구 시추에 걸린 기간은 2009년 10월 1일부터 2010년 8월 12일까지 총 10개월이나 걸렸으며, 시추비용만도 5,519만5천달러(616억5,500만원/2010.10.6 1달러=1,121원 환율적용)로 최초 시추 계획(안)의 시추기간과 시추비용보다도 배 이상이나 증가하였음.

□ 최초 계획(안)보다 시추기간과 시추지용이 증가한 사유는 시추한 광구의 주 저류층은 중생대 파쇄석회암층으로 지질구조가 복잡하고, 시추공 붕괴, 이수손실 등으로 시추 중 많은 어려움을 겪어 시추기간이 당초 계획대비 증가하였음. 즉, 광구 자체 선택에 문제가 있었다는 것임.

□ 이라크 쿠르드 바지안 광구 1차 시추 과정에서 장비까지 손실

□ 금번 1차 이라크 쿠르드 바지안 광구 시추과정에서 시추장비가 손실되었음. 손실된 시추장비는  총4개로 ①Wireline Logging Tools(물리검증용 장비), ②Bit(시추), ③Directional tools(시추 및 방향성시추), ④Fishing tools(피싱) 등이며, 손실된 同4개의 장비의 가격은 총 127만8천불(14억3,264만원)이나 됨.

□ 지적사항

<지적1>

□ 한국석유공사는 이라크 쿠르드 바지안 광구의 첫 번째 탐사결과, 일산 최대 970배럴(평균 200배럴)원유 및 3백만 입방피트(원유 환산 570배럴)천연가스가 산출될 것으로 분석하였음. 이는 바지안 광구 주변의 他광구에서 생산되는 원유량에 비해 턱없이 부족한 원유 산출량임.

□ 실제 바지안 광구 주변의 Tawke(타우케) 유전, Taq Taq(타크 트크) 유전의 경우 Tawke(타우케) 유전 시추 1공당 일산 원유 약5천배럴, Taq Taq(타크 트크) 유전 시추 1공당 일산 원유 약2천7백배럴이나 생산되고 있음.

□ 물론 위에서 언급한 두 광구는 여러 시추 결과 최상의 광구의 공에서 나오는 원유량이라 비교하는데 다소의 무리가 있을 수는 있음. 그러나 단순비교라 하더라도 두 광구 1공당 생산되는 원유량은 금번에 시추한 바지안 광구 1공 평균 생산량과 비교할 때, 최대 25배에서 14배 많은 생산량임. 이는 금번 시추한 바지안 광구가 예상보다 소규모일 가능성을 배제할 수 없음을 입증하는 결과인 것임.

<지적2>

□ 또한 한국석유공사는 이라크 쿠르드 바지안 광구 1차 시추 결과, 최초 시추계획(안)보다 시추기간과 시추비용이 배 이상 증가하였음. 최초 한국석유공사의 이라크 쿠르드 바지안 광구시추계획(안)에서는 시추기간이 2009년 10월 1일부터 2010년 1월 28일까지 총 4개월의 기간이 소요되며, 시추비용은 2만5,000불이었음.

□ 그러나 실제 이라크 쿠르드 바지안 광구 시추에 걸린 기간은 2009년 10월 1일부터 2010년 8월 12일까지 총 10개월이나 걸렸으며, 시추비용만도 5,519만5천달러(616억5,500만원/2010.10.6 1달러=1,121원 환율적용)로 최초 시추 계획(안)의 시추기간과 시추비용보다도 배 이상이나 증가하였음.

□ 더욱이 첫 번째 시추한 이라크 쿠르드 바지안 광구의 시추과정에서 주요 시추장비가 손실되었음. 손실된 시추장비는  총4개로 ①Wireline Logging Tools(물리검증용 장비), ②Bit(시추), ③Directional tools(시추 및 방향성시추), ④Fishing tools(피싱) 등이며, 손실된 同4개의 장비의 가격은 총 127만8천불(14억3,264만원)이나 됨.

<지적3>

□ 한국석유공사는 현재 쿠르드 지역 석유개발사업에 참여하고 있는 외국 석유회사도 많은 어려움을 겪고 있다며, 애써 이라크 쿠르드 바지안 광구에서 들어난 문제점과 의혹들을 축소하고 있음.

□ 한국석유공사는 이라크 쿠르드 바지안 광구 주변 광구와 비교 분석을 실시하여 바지안 광구의 경제성에 대한 타당성 재검토를 하여야 할 것임. 특혜의혹을 부인하기 위한 □억지춘향식 밀어붙이기 광구개발□은 하지 말아야 할 것임.