	국회의원 권선택 보 도 자 료
	담당자 : 윤나영 비서관(T.010-2228-4512) 발신 : 2010.10.12
서울특별시 영등포구 여의도동1번지 국회본청 216호 자유선진당 원내대표실 전화:02)784-6233 팩스:02) 788-3717

대전충청권 노선만 개통지연

왜 대전충청노선만 예산부족?

도로공사 신설 노선 중 유독 대전충청지역의 노선만 ‘예산부족’을 이유로 개통이 지연된 것으로 확인되어 논란이 되고 있다.

국토해양위 권선택 의원(자유선진당, 대전 중구)은 2000년 이후 도로공사가 신설한 고속도로 35개 노선을 분석한 결과, 단 3개의 노선만이 개통이 지연되었는데, 지역에서 노선변경에 대한 요구가 있어 개통이 지연된 노선(무안광주선, 나주-광주구간)을 제외하면 이외 두 개 노선은 모두 대전충청지역 노선이었다고 밝혔다.

고속도로 개통현황(개통일 기준)

연도	′00	′01	′02	′03	′04	′05	′06	′07	′08	′09	합계
개통노선수	3	8	2	-	2	1	1	7	3	8	35

※ 개통지연노선:

- (무안광주선)나주-광주(′07.12.30→′08.5.28) 호남대구간노선변경

- (당진영덕선)당진-대전(′08.12.31→′09.5.28) 예산부족

- (서천공주선)서천-공주(′08.12.31→′09.5.28) 예산부족

실제로 10년간 신설된 노선이 35곳 가운데, 유독 대전충청지역의 노선만이 ‘예산부족’을 이유로 개통이 지연되었는데, 예산부족을 이유로 대전충청권에 두 개 노선의 개통이 지연되는 기간중에도 ‘(동해선)부산-울산’노선은 예정대로 ′08.12.29에 개통된 것으로 나타났다.

이에 대해 권 의원은 “대전충청지역은 한반도의 중심에 위치한 교통물류의 심장부”라고 강조하고, “향후 대전충청지역이 도로공사만이 푸대접 받는 일이 없도록 공정하게 사업을 추진해야한다”고 역설했다.

【첨 부】

개통이 지연된 노선 현황

구분	구간	개통일	당초개통예정일	개통지연사유	공사기간
남해선	산인-창원	2001.10.06	-	-	1996.03.26 ~ 2001.10.06
무안광주선	무안-나주	2007.11.8	-	-	2002.12.24 ~ 2007.11.8
	나주-광주	2008.5.28	2007.12.30	호남대학교 구간 노선변경	2002.12.24 ~ 2008.05.28
서해안선	무안-군산	2001.12.21	-	-	1998.04.30 ~ 2001.12.21
	서천-당진	2001.09.27	-	-	1996.12.27 ~ 2001.11.20
	당진-안중	2000.11.10	-	-	1993.12.17 ~ 1996.12.18
평택화성선	평택-화성	2009.10.29	-	-	2005.6.29 ~ 2009.10.28
익산포항선	익산-장수나들목	2007.12.13	-	-	2001.11.22 ~ 2007.12.22
	장수나들목-장수분기점	2007.12.13	-	-	2001.11.22 ~ 2007.12.22
	대구-포항	2004.12.07	-	-	1998.04.15 ~ 2004.12.07
당진영덕선	청원-상주	2007.11.28	-	-	2001.09.17 ~ 2007.12.14
	당진-대전	2009.05.28	2008.12.31	예산 부족	2001.12.22 ~ 2009.08.28
통영대전선	통영-진주	2005.12.12	-	-	1997.05.12 ~ 2005.12.12
중부선	함양-무주	2001.11.21	-	-	1996.11.15 ~ 2001.11.21
	무주-산내	2000.12.22	-	-	1995.12.23 ~ 2000.12.22
제2중부선	마장-산곡	2001.11.23	-	-	1997.04.24 ~ 2001.11.29
평택제천선	평택-안성	2002.12.12	-	-	1997.12.22 ~ 2002.12.12
	서안성-남안성	2007.8.31	-	-	2002.12.24 ~ 2008. 5. 8
	남안성-음성	2008.11.11	-	-	2002.12.24 ~ 2008.12.15
중부내륙선	현풍-김천	2007.11.29	-	-	2001.12.31 ~ 2007.12.15
	김천-북상주	2001.9.28	-	-	1996.10. 8 ~ 2001.12. 4
	북상주-충주	2004.12.15	-		1997.10. 8 ~ 2004.12.15
	여주-충주	2002.12.20	-	-	1996.10. 9 ~ 2002.12.20
영동선	안산-신갈	2000.12.20	-	-	1997.4 ~ 2001.9
중앙선	풍기-제천	2001.12.19	-	-	1995.12.26 ~ 2001.12.19
	만종-홍천	2001.08.17	-	-	1996.08.09 ~ 2001.08.31
서울양양선	강일-조양	2009.7.15	-	-	2004.8.12 ~ 2009.8.11
	조양-동홍천	2009.10.30	-	-	2004. 3.16 ~ 2009.12.15
동해선	현남-하조대	2009.11.27	-	-	2004.12.30 ~ 2009.12.15
	부산-울산	2008.12.29	-	-	2001.11.29 ~ 2008.12.29
서천공주선	서천-공주	2009.05.28	2008.12.31	예산 부족	2001.12.27 ~ 2009.08.28
오산화성선	오산-화성	2009.10.29	-	-	2005.6.29 ~ 2009.10.28
고창담양선	고창-장성	2007.12.13	-	-	2002.12.30 ~ 2007.11.27
	장성-담양	2006.12.07	-	-	2001.05.10 ~ 2006.12.10
수도권제2순환선	봉담-동탄	2009.10.29	-	-	2005.6.29 ~ 2009.10.28

- 끝 -