2013 국토교통위원회 국정감사 질의서 - 전라남도

뱀 잡는 ‘뱀 생태공원 조성사업’

8백만원짜리 초록아나콘다 등 41마리 폐사

설계변경‧개장지연‧인력채용 지연 등 문제 심각

□ 도지사 공약사항 함평군 뱀생태공원, 총제적 난관

설계변경으로 19억 증액, 관리미숙으로 41마리 뱀 폐사

‘11년 9월 개장하려던 공원 2년 이상 지연...인력채용 할 돈도 없어

(질의) 지사께서 공약사업으로 함평에 추진한 뱀생태공원은 2011년 개장예정이었으나 2년 넘게 추진 지연되고 있음.

개장예정시기인 ‘11년 9월 이후 설계변경(12월) 진행돼 사업비가 19억원이나 증액됐고, 그동안 관리 미숙으로 폐사된 뱀이 41마리나 돼.

인건비도 부족해 현재 안행부에 증액요구 중인 상황으로 사육사도 없어 2차로 조정된 개장시기(‘13년 8월)도 벌써 지나버려.

현재 ‘14년 나비축제와 함께 개장될 예정인데, 변동 없이 개장될 수 있겠는가?

□ (사업현황) 도지사 공약사항으로 사업비 195(광특107/특교10/도비14/군비64)억원을 들여 함평군에 뱀 생태공원을 조성하려 했으나 전시생육공간 확대 및 공사완공시기가 지연돼 당초 ‘11년 9월 예정돼 있던 개장일이 ’13년 8월로 조정, 현재까지도 지연돼 온 사업임

□ (문제점) 1. 설계변경에 따른 사업비 증액

-전남도에서는 ‘11년 12월 설계변경을 통해 당초 176억원이던 사업비를 19억원 증액해 195억원으로 사업 확대

-주요내용으로는 전시관 면적 확대, 한국관 증축, 악어관 용도변경 등임

2. 생태공원 개장 지연에 따른 월 운영비 지출

-전남도의 개장 지연으로 인해 월 4백30만원 수준의 운영비 지출

3. 관리미숙으로 수입뱀 63마리 중 41마리(65%)의 뱀 폐사

- 관리 미숙으로 인한 41마리의 뱀이 폐사한 것 뿐만 아니라 사육사 채용지연으로 실제적인 관리 인원 부재(안행부에 요구 중)

[수입 뱀 폐사 현황]

(단위:원)

순번	품명	폐사수	금액
1	쿠퍼레드랫스네이크	2	159,032
2	웨타르아일랜드핏바이퍼	2	593,670
3	그린바인스네이크	3	148,416
4	서부다이아몬드방울뱀	2	2,968,350
5	알비노미안마비단뱀	1	4,947,250
6	미얀마비단뱀	1	2,473,625
7	수마트라왕도마뱀	2	7,915,600
8	맹그로브 스네이크	3	296,835
9	라이노바이퍼	2	1,781,010
10	턱수염도마뱀	2	296,834
11	사하라 뿔 살모사	1	1,484,175
12	초록비단뱀	1	791,560
13	토게이게코	5	247,360
14	머드퍼피	6	3,324,552
15	바나나캘리포니아킹스네이크	1	227,573
16	퓨블란우유뱀	2	356,202
17	그린/갈색바실리스크	2	296,834
18	알비노플로리다킹스네이크	2	356,202
19	목도리도마뱀	2	692,614
20	초록아나콘다	1	8,410,325
총계	20개 종	41(65%)	37,768,019

*출처:전라남도청

[전라남도청 뱀생태사업 조성사업 현황]

○ 폐사원인 : 당초 ‘11. 9월 개장 예정으로 국내순치를 위해 동절기에 국내 반입되었으나, 일부 뱀이 국내적응(온도, 습도 등) 실패

○ 조치사항 : 생존 뱀은 서울 목동 생명과학박물관에 위탁관리 중이며 폐사 뱀은 박제․편본하여 전시할 예정임

○ 미개장 사유

- 전시생육공간 확대로 공사완공시기 지연 : (당초)’11. 9월 → (조정) ’13. 8월

- 사육시설 독소 제거를 위해 환기기간 최소 3개월 이상 소요

- 사육사 채용 지연 (안전행정부에 총액인건비 증액 요구 중)

○ 향후 운영계획

- 국내종 채집 전시를 위한 생물자원보전시설 등록 절차 이행

- 장비 시운전, 시설물 보완, 동물 입식 및 적응도 테스트 후 정식 개원 예정 (’14. 4월 나비축제시)