2013. 10. 15	국회의원	정 청 래
국감 보도자료
통일부 국정감사 민주당 (서울 마포을)

국회의원회관 150-701 서울시 영등포구 의사당대로 1 국회의원회관 317호  Tel. 784-9241  Fax.788-0358

e-mail ssaribi317@hanmail.net | 트위터  twitter.com/ssaribi  |  페이스북  facebook.com/cheongrae

진입로도 없이 496원 건물 “짓고 보자?”

‘한반도통일미래센터’ 진입로 없어‘무용지물’위기

센터 준공 2014년 8월 예정,

진입로는 2015년 6월-12월 준공 예정

통일부가 경기도 연천군 전곡읍 마포리 일원에 총 사업비 496억원을 들여 짓고 있는 ‘한반도통일미래센터’가 완공 후에도 진입로가 확보되지 않아 ‘무용지물’이 될 위기에 있는 것으로 드러났다.

외교통일위원회 소속 민주당 정청래 의원(서울 마포을)에 따르면, 통일부에서 건립중인 ‘한반도통일미래센터’의 공사공정률은 현재 19.3%이며 준공예정일은 2014년 8월이다. 이에 맞추어 현재 국토해양부에서는 37번 확장도로(노란색)를, 연천군에서 진입도로(빨간색) 및 교량(파란색)을 공사하고 있다. (그림1참조)

<그림1. 한반도미래통일센터 완공 후 진입로와 현재 진입로>

<센터 완공 이후 예상 진입로>	<현재 진입로>

통일부는 센터와 진입로가 동시에 준공되므로 센터 준공 직후 진입도로 이용에 어려움이 없다는 입장이지만 정 의원실에서 담당 시공사에 확인해 본 결과 37번국도 확장공사는 2015년 6월, 연천군에서 공사 중인 진입도로는 2015년 12월 말에 준공될 예정인 것으로 밝혀졌다.

즉,‘한반도통일미래센터’준공 후 제대로 된 진입도로를 확보하지 못해 ‘무용지물’이 될 우려가 높은 것이다. 도로가 완공되지 못할 경우 현재 공사차량 진입도로로 이용되는 비포장 산길을 이용하는 것 외에는 다른 방법이 없는 실정이다.(그림2.)

현재 공사 중인 현장을 눈으로 직접 확인해보면 한눈에 봐도 통일부가 말한 2014년 8월 완공은 현실적으로 어려워 보인다. (그림.3)

<그림2. 공사중인 진입로 상황>

<2015.06 완공 예정인 37번국도 공사현장>	<2015.08 완공 예정인 교량 공사 부지>

<그림3. 한반도미래통일센터로 가는 현재 진입로인 비포장 산길>

<출처 : 정청래의원실>

한반도통일미래센터는 당초 ‘남북청소년교류센터’로 건립 추진되었으나 2012년 국감 당시 외통위에서 정청래 의원이 남북청소년 교류가 0명이고 남북관계가 모두 파탄난 상태에서 건립하는 것에 대해 강하게 문제제기하여 사업 목적 및 용도가 모두 변경된바 있다. 센터가 개관하면 연평균 약 70억의 운영 예산이 더 소요될 예정이다.