<한국수자원공사 국정감사>

1. 4대강 사업 원금보전 실패 및 생태계 변화에 대해 책임 있는 자세로 사죄하고, 대책 마련해야 할 것

2. 수자원공사, 신도시 개발사업 지연대책 마련 필요

중장기 재무관리계획에 따라, 신도시 부문에서 4,405억원 감축 예정

사업 지연 및 분양‧입주 일정에 차질 없도록 현실적인 대책 마련해야 할 것

3. 4대강 사업 때문에 악화된 재무상황으로 해외사업 반토막

- 수자원공사, 해외사업 전체 투자액 8,114억 원 중 3,885억원(47.9%) 축소

- 전체 23개 해외사업 중 56.2%에 해당하는 13개 사업 중단

4. 지방상수도의 효율적 운영방안 강구해야 할 것

높은 생산원가, 높은 평균단가, 그러나 현실화율은 저조

5. 혈세 먹는 경인 아라뱃길, 활성화 대책 필요

4대강 사업 원금보전 실패 및 생태계 변화에 대해

책임 있는 자세로 사죄하고, 대책 마련해야 할 것

국회 국토교통위원회 소속 이찬열(수원갑, 새정치민주연합)의원은 14일 대전 한국수자원공사 회의실에서 진행된 한국수자원공사(이하 ‘수자원공사’) 국정감사에서 4대강 사업으로 발생한 수자원공사의 8조원의 부채문제와 생태계 변화에 대해 강하게 질타하면서 책임자 처벌 및 근본적인 대책 마련을 촉구했다.

이 의원은 2009년 당시 수자원공사가 국토해양부로부터 4대강 관련 빚 8조원을 떠넘겨 받으면서 친수구역개발을 통해서 원금을 갚아나가겠다고 했으나, 현재 친수구역 개발로 인한 예상 수익이 저조한 것에 대해 지적했다. 수자원공사에서 제출받은 자료에 따르면 수자원공사는 부산 에코델타시티‧나주 노안지구‧부여 규암지구 등 3개 사업을 친수구역으로 지정, 5조 4,622억원을 투자하여 6천억원의 순이익이 예상되는데, 이는 수자원공사가 4대강 사업에 투입한 금액의 7.5%에 불과하다.

이에 대해 이 의원은 “친수구역개발로 예상되는 수익이 상당히 적은 것은 애초에 사업성이 없는 사업이었거나, 정부가 지원책을 마련하겠다고 하자 이에 편승해가려던 것 아니냐”고 질타하며, “친수구역 개발로 8조원을 갚겠다는 계획은 모두 거짓이었고, 실패로 돌아간 것에 대해 인정하고 당시 이 계획에 동참했던 담당자를 철저히 조사하여 책임을 물어야 한다”고 주장했다.

더불어 4대강 사업 이후 출몰하고 있는 ‘큰빗 이끼벌레’에 대한 질타를 이어갔다. 이 의원은 “수자원공사가 제출한 자문교수의 보고서*를 살펴보면 ‘이 동물의 번성이 4대강 사업과 무관하지 않다’고 언급하고 있음에도, 공사는 ‘다소 혐오감을 주고, 환경부 요청에 의거’에 수거하고 있으며 ‘강수량이 적어 과거에 비해 늘어난 것처럼 보인다’는 안일한 답변만 하고 있다”고 지적하며, “생태계 변화를 초래한 죄에 대해 책임 있는 자세로 사죄하고, 재발되지 않도록 철저하게 원인을 규명하여 대책을 마련하라”고 주문했다.

* ⌜큰빗이끼벌레의 생태에 관한 자문의견서⌟(2014.7.21. 부산대학교 주기재 교수, p.17)

“종합적으로 해당 정부부처는 이 동물의 번성과 유속과의 관련성이 높은 점을 고려할 때 보건설 등 사대강 사업과 무관하지 않은 사안이라는 사실을 직시해야 하며 단순히 피해갈 사안은 아님. 유속조절, 조절방류, 조류발생 억제와 이 동물의 번성을 연계하여 해결책을 모색할 필요가 있음”

수자원공사, 신도시 개발사업 지연대책 마련 필요

중장기 재무관리계획에 따라, 신도시 부문에서 4,405억원 감축 예정 -

사업 지연 및 분양‧입주 일정에 차질 없도록 현실적인 대책 마련해야 할 것 -

국회 국토교통위원회 소속 이찬열(수원갑, 새정치민주연합)의원은 14일 한국수자원공사(이하 ‘수자원공사’) 국정감사에서 수자원공사의 중장기 재무관리계획에 따라 신도시개발사업이 지연될 것에 대한 우려를 제기했다.

이찬열 의원이 국회예산정책처로부터 제출받은 자료에 따르면, 수자원공사가 계획한 대로 신도시부문의 투자 규모를 축소할 경우 계획된 사업기간 내에 사업 완료가 불가능하며, 개발 진행에 상당한 영향을 줄 것으로 보인다.

수자원공사는 중장기 재무관리계획에 따라 신도시 부문에서 4,405억원 감축 예정이며, 그 중 시화 MTV(Multi Techno Valley)사업과 송산그린시티가 1,905억원으로 43.2%에 달한다.

시화 MTV 개발사업의 경우 2017년까지 1,078억원이 축소될 예정인데, 이는 계획된 사업기간인 2016년까지 사실상 사업 완료가 불가능함을 의미한다. 실제로 수자원공사의 시화 MTV개발사업의 향후 투자계획에 따르면 2018년 이후 이뤄질 투자액은 9,273억원으로 총 사업비 3조 6,022억원의 25.7%에 달한다. 현재 공정률 70% 수준에서 투자가 축소된다면, 향후 기업의 입주가 지연되거나 기반시설 부족으로 인하여 입주기업의 생산에 지장을 주는 등 문제가 발생할 것으로 보인다.

또한 송산그린시티의 경우 이미 사업이 지연되고 있으며, 분양률은 7.1%, 대금회수율이 10.4%에 불과한 상황에서 연간 10% 정도의 투자를 축소하게 될 경우 사업 추진에 큰 타격을 줄 것으로 예상된다. 특히 동사업의 경우, 1단계 동측지구 개발이 완료되어 대금회수가 이루어진 후에 2단계 남측지구의 개발이 시작될 예정이기 때문에, 1단계 사업이 성공적으로 마무리 되지 못한다면, 사업 전체가 중단될 상황이 발생할 수도 있다.

이에 대해 이 의원은 “4대강 사업 부채로 인해 재무 상황이 최악으로 치닫자, 자구노력의 일환으로 아무 대책 없이 신도시 사업 투자 규모를 축소하는 것은 위험한 발상이다”라고 지적하며, “수자원공사는 시화 지역에 대한 투자 축소가 향후 분양 및 입주 여건에 악영향을 주지 않도록 대책을 마련해야 할 것이며, 송산 그린시티 개발사업이 더 이상 지연되지 않도록 단계적 개발계획에 대한 재검토 등 현실적인 대책을 마련해야 할 것이다”라고 밝혔다. (끝)

※ 붙임 : 한국수자원공사 신도시개발사업 투자 축소계획현황, 한국수자원공사 신도시 개발 현황, 신도시 부문 향후 투자계획, 신도시 개발사업 투자‧분양‧대금회수 현황

[참고1] 한국수자원공사 신도시개발사업 투자 축소계획현황

						(단위 : 억원, %)
구분		2014	2015	2016	2017	합계
신도시(a)*	시화MTV	-	513	103	462	1,078	1,905
	송산그린시티	150	300	210	167	827
산업단지	구미하이테크	-	-	200	200	400
친수구역	부산에코델타시티	1,548	446	△277	383	2,100
합계(b)		1,698	1,259	236	1,212	4,405
비율(a/b)		8.8	64.6	132.6	51.9	43.2
(출처 : 한국수자원공사, 국회예산정책처)

[참고2] 한국수자원공사 신도시 개발 현황

					(단위: ㎢, 억원, 만명)
구분	계	안산신도시		시화지구
		1단계 (공단 + 주거)	2단계 (주거)	1단계 (방조제 포함)	MTV (공단 + 상업)	송 산 그린시티
면적	188.09	49.75	9.47	56.61	16.66	55.60
사업비	174,371	6,551	16,939	20,809	36,022	94,050
계획인구	74.4	30	14	14	1.4	15
사업기간	`77~`22	`77~`93	`92~`09	`86~`10	`02~`16	`07~`22
추진현황	-	개발완료	개발완료	개발완료	공정70.4% (단지조성)	공정1.4% (동측31.8%)
(출처 : 한국수자원공사, 국회예산정책처)					(2014.5.기준)

[참고3] 신도시 부문 향후 투자계획

<신도시 부문 향후 투자계획>

(단위: 억원)

구분		2013년 까지	2014	2015	2016	2017	2018년 이후	합계
신도시 소계		31,155	4,083	5,530	5,251	3,785	80,268	130,072
	시화MTV	16,888	2,420	2,748	2,772	1,921	9,273	36,022
	송산그린시티	14,267	1,663	2,782	2,479	1,864	70,995	94,050
산업단지 소계		17,697	2,309	2,578	2,240	1,280	6,564	32,668
	구미확장단지	5,805	570	679	578	-	-	7,632
	구미하이테크	3,784	1,728	1,898	1,661	1,279	6,518	16,868
	여수확장단지	8,088	3	1	1	1	46	8,140
	구미디지털	20	8	-	-	-	-	28
친수사업 소계		4,370	6,006	6,640	5,005	3,417	18,307	43,745
	부산EDC	4,368	5,971	6,580	4,920	3,363	18,307	43,509
	나주노안지구	1	26	20	41	24	-	112
	부여규암지구	1	9	40	44	30	-	124
투자 금액 합계		53,222	12,398	14,748	12,496	8,482	105,139	206,485
(출처 : 한국수자원공사, 국회예산정책처)

[참고4] 신도시 개발사업 투자‧분양‧대금회수 현황

										(단위: 억원, %)
구분		2010년		2011년		2012년		2013년		합계
		계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획 (a)	실적 (b)	비율 (b/a)
투자	소계	5,203	5,060	4,488	4,358	5,232	5,146	4,193	4,169	19,116	18,733	98.0
	시화MTV	2,244	2,126	2,681	2,542	2,944	2,828	2,914	2,812	10,783	10,308	95.6
	송산그린시티	2,959	2,934	1,807	1,816	2,288	2,318	1,279	1,357	8,333	8,425	101.1
분양	소계	1,601	1,667	3,405	6,976	9,196	4,747	4,173	4,426	18,375	17,816	97.0
	시화MTV	1,601	1,667	3,405	6,560	4,156	4,747	3,383	4,426	12,545	17,400	138.7
	송산그린시티	-	-	-	416	5,040	-	790	-	5,830	416	7.1
대금 회수	소계	380	167	871	1,904	3,391	4,407	3,076	4,217	7,718	10,695	138.6
	시화MTV	380	167	871	1,862	1,887	4,347	2,950	4,149	6,088	10,525	172.9
	송산그린시티	-	-	-	42	1,504	60	126	68	1,630	170	10.4
(출처 : 한국수자원공사, 국회예산정책처)

4대강 사업 때문에 악화된 재무상황으로 해외사업 반토막

- 수자원공사, 해외사업 전체 투자액 8,114억 원 중 3,885억원(47.9%) 축소 -

-전체 23개 해외사업 중 56.2%에 해당하는 13개 사업 중단-

국회 국토교통위원회 소속 이찬열(수원갑, 새정치민주연합)의원은 14일 한국수자원공사(이하 ‘수자원공사’) 국정감사에서 수자원공사의 무분별한 해외사업 부문 축소 및 철회에 대해 문제를 제기하였다.

이찬열 의원이 수자원공사 및 국회예산정책처에서 제출받은 자료에 따르면, 수자원공사는 자구노력의 일환으로 2017년까지 1조 919억의 투자금액을 축소할 예정으로, 이 중 해외사업이 3,885억 원으로 35.6%에 해당한다. 투자를 축소할 3,885억원은 향후 해외사업에 투자될 전체 투자액 8,114의 47.9%에 해당한다.

축소 계획을 상세히 살펴보면, 7개 사업 67억원에 대해서는 시기를 조정할 계획이며, 16개 사업 3,818억 원은 재무투자자 유치 등을 통해 지분율을 축소하거나 사업을 철회할 예정이다. 해외투자 축소로 인하여 전체 23개 해외사업 중 56.2%에 해당하는 13개 사업이 중단될 예정이다.

이찬열 의원은 “수자원공사가 해외사업 부문에서 전체 투자액의 절반을 축소한다는 것은 해외사업 추진 초기에 실시된 사업의 수익성에 대한 검토가 부족했거나, 4대강 부채로 인한 재무 상황 악화에 대처하기 위해 합리적인 기준 없이 사업을 축소 또는 철회했다는 것을 의미한다”고 지적하며, “수자원공사의 내부 사정으로 일방적으로 사업을 축소 또는 철회하는 것은 대한민국에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있으므로, 사업축소 및 철회에 대해 정확한 기준을 세우고 신중히 판단하여 추진해 달라”고 주문했다. (끝)

※ 붙임 : 해외부문 연도별‧사업별 부채감축 계획, 해외사업 부문별 향후 투자계획

[참고1] 해외부문 연도별‧사업별 부채감축 계획

						(단위:억원)
사업			2014	2015	2016	2017	합계
투자축소소계			118	678	789	2,233	3,818
	지분축소	라오스 Xepon3 수력발전	-	64	34	34	132
		조지아 Nenskra 수력발전	-	360	128	185	673
		파키스탄 LPV 수력발전	26	-	-	138	164
	사업철회	이집트 Alexandria 하수도	-	131	355	126	612
		태국 Phuket 수도	-	-	130	129	259
		중국 복건성 푸안시 하수도	-	-	-	89	89
		중국 광동성 혜주시 상수도	-	38	56	56	150
		중국 요령성 철령시 하수도	-	-	-	90	90
		중국 요령성 안산시 하수도	-	-	-	90	90
		우간다 Isimba 수력발전	-	-	86	290	376
		탄자니아 Ruhudji 수력발전	-	-	-	290	290
		미얀마 Yangon 수도	92	-	-	-	92
		그리스 EYATH 지분인수	-	-	-	143	143
		Veolia Water UK 지분인수	-	-	-	143	143
		이집트 Abu Rawash 하수도	-	-	-	430	430
		중국 하북성 형태시 상수도	-	85	-	-	85
시기조정 소계			△172	191	90	△42	67
		파키스탄 Patrind 수력발전	-	21	29	-	50
		네팔 UMA 수력발전	-	40	60	48	148
		인도네시아 Gresik 상수도	-	21	△11	-	10
		쿠웨이트 UAH 하수도	15	△11	6	-	10
		탄자니아 Iringa 수력발전	-	96	22	△90	28
		필리핀 Angat 수력발전	△226	-	-	-	△226
		인도네시아 Bali 상수도	39	24	-16	-	47
부채감축금액 합계			△54	869	879	2,191	3,885
(출처 : 한국수자원공사)

[참고2] 해외사업 부문별 향후 투자계획

(단위: 억원)

구분		2013년 까지	2014	2015	2016	2017	2018년 이후	합계
수력발전 소계		464	250	999	648	578	369	3,308
	파키스탄 Patrind	464	40	310	131	-	-	945
	필리핀 Angat	-	210	578	-	-	-	788
	네팔 UMA	-	-	-	-	12	69	81
	라오스 Xepon3	-	-	15	50	50	25	140
	탄자니아 Iringa	-	-	-	74	186	80	340
	조지아 Nenskra	-	-	96	393	330	195	1,014
상수도 소계		-	-	-	167	-	531	698
	인도네시아 Bali	-	-	-	75	-	317	392
	인도네시아 Gresik	-	-	-	92	-	214	306
하수도 소계		-	-	-	46	2	125	173
	쿠웨이트 UAH	-	-	-	46	2	125	173
해외펀드 소계		-	50	-	-	-	-	50
	글로벌인프라펀드	-	50	-	-	-	-	50
투자 금액 합계		464	300	999	861	580	1,025	4,229

지방상수도의 효율적 운영방안 강구해야 할 것

높은 생산원가, 높은 평균단가, 그러나 현실화율은 저조 -

국회 국토교통위원회 소속 이찬열(수원갑, 새정치민주연합)의원은 14일 한국수자원공사(이하 ‘수자원공사’) 국정감사에서 수자원공사가 실시하고 있는 22곳의 지방상수도 수탁업무에 대하여 효율적인 운영방안을 주문했다.

이찬열 의원이 수자원공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 수자원공사가 운영하는 지방상수도의 생산원가 평균은 1,308.6원으로 전국평균 814.7원보다 493.9원 높다. 각 지역별로 살펴보면, 충북 단양군의 생산원가는 2,050.8원으로 지역평균인 836.63원보다 무려 1,214.2원 높은 반면, 경북 봉화는 625.0원으로 지역평균 1,120.9원으로 459.9원 낮다.

생산원가가 높은 만큼 평균단가도 높은 편인데, 수자원공사가 운영하는 지방상수도의 평균단가는 737.4원으로 전국평균 649.1원보다 88.3원 높다. 경남 통영의 경우 1,071.0원으로 지역평균 781.8원보다 289.2원 높은데 반해, 전남 진도는 571.0원으로 지역평균 829.6원보다 258.6원 낮은 실정이다.

이와 같이 수자원공사가 운영‧관리하는 지방상수도의 경우 평균적으로 생산원가와 평균단가가 높은 편이지만, 현실화율의 경우 56.4%에 불과하여 전국 79.7%에 한참 밑돌고 있는 실정이다.

이에 대해 이 의원은 “생산원가와 평균단가 모두 높은데 현실화율이 매우 낮다는 것은 수자원공사의 지방상수도 운영방식이 매우 비효율적이라는 것을 반증하는 것이다”라고 지적하며, “운영방식의 효율성을 높여 현실화율을 높일 수 있는 방안을 강구하라”고 말했다. (끝)

※ 붙임 : 지방상수도 생산원가‧평균단가‧현실화율 현황

						(단위 : 원/㎥, %)
구분	지역	생산원가		평균단가		현실화율
		원가	지역평균	요금	지역평균	비율	지역평균
전국		814.7		649.1		79.7
경기	동두천시	1,000.0 (282.2)	717.8	727.4 (102.5)	624.9	72.7	87.1
	양주시	976.2 (258.4)		854.2 (229.3)		87.5
	파주시	763.3 (45.5)		613.9 (-11.0)		80.4
	광주시	891.5 (173.7)		666.8 (41.9)		74.8
충북	단양군	2,050.8 (1,214.2)	836.6	857.1 (165.3)	691.8	41.8	82.7
충남	논산시	1,722.6 (628.1)	1,094.5	931.9 (200.8)	731.1	54.1	66.8
	서산시	1,214.4 (119.9)		732.7 (1.6)		60.3
	금산군	1,502.0 (407.5)		551.4 (-179.7)		36.7
	천안시	636.9 (-457.6)		638.1 (-93.0)		100.2
전북	정읍시	1,051.0 (-17.6)	1,068.6	852.4 (50.0)	902.4	81.1	84.4
전남	나주시	1,783.2 (622.0)	1,161.2	859.0 (29.4)	829.6	48.2	71.4
	함평군	1,105.0 (-56.2)		646.8 (-182.8)		58.5
	완도군	1,902.0 (740.8)		902.2 (72.6)		47.4
	진도군	2,200.0 (1,038.8)		571.0 (-258.6)		26.0
	장흥군	1,944.0 (782.8)		663.9 (-165.7)		34.1
경북	예천군	1,608.0 (487.1)	1,120.9	594.6 (-79.9)	674.5	37.0	60.2
	고령군	1,113.6 (-7.3)		498.2 (-176.3)		44.7
	봉화군	625.0 (-495.9)		430.0 (-244.5)		68.8
경남	사천시	1,169.0 (162.7)	1,006.3	829.1 (47.3)	781.8	70.9	77.7
	거제시	1,095.8 (89.5)		825.9 (44.1)		75.4
	통영시	1,203.9 (197.6)		1,071.0 (289.2)		89.0
	고성군	1,230.0 (223.7)		906.1 (124.3)		73.7
(출처 : 한국수자원공사) * 괄호안의 숫자는 지역평균과의 차액

혈세 먹는 ‘경인 아라뱃길’, 활성화 대책 필요

국회 국토교통위원회 소속 이찬열(수원갑, 새정치민주연합)의원은 14일 한국수자원공사(이하 ‘수자원공사’) 국정감사에서 경인아라뱃길 사업 부진에 대해 지적하였다.

경인아라뱃길 사업은 평시에는 내륙뱃길로 물류‧관광레저 기능을 수행하고, 홍수기에는 방수로로 활용하여 굴포천 유역의 홍수 피해 방지를 위해 진행된 사업으로, 항만 1조 3,520억원, 주운수로 6,319억원, 물류단지 6,920억원 등 총 2조 6,759억원이 투입되었다.

경인아라뱃길 결산현황을 살펴보면, 개통 첫 해인 2012년 총비용 272억원이 들었으나, 수익은 76억 9,100만원으로 195억 900만원 적자를 보았으며, 2013년에는 410억 1천만원 비용 대비 수익이 132억 800만원으로 278억 200만원을 적자를 냈다. 비용의 경우 2012년 대비 2013년에 1.5배 증가하였고 수익은 1.7배 증가하였지만, 적자분은 1.4배 증가하였다. 그 중 항만운영의 경우 수익이 약 5배 증가하였지만, 오히려 적자분은 1.3배 증가하는 양상을 보였다.

경인 아라뱃길 개통 이후 실적을 살펴보면 물동량의 경우 2012년 311톤, 2013년 537톤, 2014년 7월 말 기준 245톤에 불과하며, 승선객의 경우 2012년 12만 5천명, 2013년 17만 4천명, 2014년 7월 말 기준 2만 9천명으로 대폭 감소하였다.

경인항 장비 가동현황을 살펴보면 2012년 개통이후 2014년 9월말까지 인천터미널의 경우 전체 가동시간이 4,415.3시간으로 9.46%의 가동률을 보였고, 김포터미널의 경우, 173시간으로 0.37%의 가동률을 보여 사실상 항구로서의 기능을 제대로 이행하지 못하고 있음이 드러났다.

이와 같이 경인항의 물류기능이 저조함에 따라, 부두를 임대하여 이용하는 기업의 경우 수익을 제대로 내지 못해 임대료를 미납하는 상황까지 발생하고 있다. ㈜한진해운의 경우 2014년 9월 2일 기준 미납 임대료가 29억 3,500만원이며, ㈜이랜드크루즈는 27억 5,200만원의 미납료가 발생한 것으로 밝혀졌다.

이에 대해 이 의원은 “경인아라뱃길 사업은 원래의 목적도 달성하지 못하고, 실적도 제대로 내지 못하면서 현재까지 2,700억원의 정부 지원금을 받았고 앞으로도 1,903억원을 더 지원받을 예정이다”고 지적하면서, “국민의 반대에도 불구하고 강행한 사업으로 인해 혈세를 낭비하게 된 점에 대해 수자원공사는 뼛속까지 반성해야 하며, 더 이상 혈세가 낭비되지 않도록 활성화 방안을 제시해야 할 것이다”라고 말했다. (끝)

※ 붙임 : 경인아라뱃길 결산현황, 아라뱃길 물동량 처리 및 여객 승선실적, 경인항 장비 가동 현황, 부두 임대료 미납 현황

[참고1] 경인아라뱃길 결산현황

			(단위: 백만원)
		2012년(A)	2013년(B)	증가분(B-A)(%)
비용	합계	27,200	41,010	13,810 (150.8)
	항만운영	21,916	32,105	10,189 (146.5)
	주운수로운영	3,387	5,903	2,516 (174.3)
	갑문운영	1,896	3,001	1,105 (158.3)
수익	합계	7,691	13,208	5,517 (171.7)
	항만운영	856	4,278	3,422 (499.8)
	주운수로운영	3,409	5,903	2,494 (173.2)
	갑문운영	3,426	3,026	△400 (88.3)
수익-비용	합계	△19,509	△27,802	△8,293 (142.5)
	항만운영	△21,060	△27,827	△6,767 (132.1)
	주운수로운영	22	0	△22 (-)
	갑문운영	1,530	25	△1,505 (1.6)
(출처 : 한국수자원공사)

[참고2] 아라뱃길 물동량 처리 및 승객 승선실적

구분		2012년 (5월~12월)	2013년	2014년7월말
물동량 (천톤)	소 계	311	537	245
	컨테이너	223	439	213
	일반화물*	88	97	32
승선객(천명)		125	174	29
(출처 : 한국수자원공사) * 일반화물 : 경인항 화물부두에서 처리한 컨테이너화물 이외 철재, 잡화 등 화물

[참고3] 경인항 장비 가동 현황

				(단위 : 시간, %)
구분		합계	`12년	`13년	`14.9월
인천터미널	가동시간	4,415.3	1,392.0	2,138.5	884.8
	가동율	9.46	8.68	12.21	6.75
김포터미널	가동시간	173.0	136.5	13.0	23.5
	가동율	0.37	0.85	0.07	0.18
(출처 : 한국수자원공사)

[참고4] 부두 임대료 미납 현황

		(단위 : 천원, VAT포함)
임차인	임대계약기간	연임대료			미납 임대료
		12년	13년	14년
㈜한진해운	12.5.25~41.12.31	1,636,607	2,973,300	3,500,200	2,934,994
㈜이랜드크루즈	12.5.25~21.12.31	512,563	1,263,306	1,291,113	2,752,022
(출처 : 한국수자원공사)				(`14.9.2.기준)