	국정감사 보도자료	제공일 : 2015년 9월 21일(화요일) Tel. 784-6040, Fax.788-0182 국회의원회관 817호 홈페이지 : www.gowithwr.com 트위터 : @gowith_wraenoh
	국회의원 노웅래 새정치민주연합 마포(갑) 국회의원
	“국민에게 길을 묻겠습니다.”

‘프랜차이즈 특화거리’졸속 개장, 시민과 상인들 불만 제기

❏ 대구시 ‘프랜차이즈 특구’ 사업 개요

❍ 대구시에서 추진한 ‘프랜차이즈 특화거리’ 사업은 대구시가 대구 서구에 위치한 전통시장인 ‘서부시장’을 재정비하여 상권을 활성화 시키는 것으로,

- 기능이 상실하여 빈 점포 상태인 서부시장에 시설현대화 작업과 리모델링 작업을 하고, 지역 프랜차이즈 업체(치킨, 커피, 기타 먹거리)를 입점 시켜 프랜차이즈 타운을 조성, 신규 고객의 유입을 확대하는 것을 사업의 주목적으로 함.

◌ 사업개요

- 규     모 : 프랜차이즈 20개 업체(치킨 8, 먹거리 10, 커피 2)

- 위     치 : 서부시장 내(62개 점포)

- 내     용 : 기반시설(전기, 가스, 도로 등) 정비 및 주차장 조성

※ 점포 실내인테리어는 입점업체에서 부담

- 기     간 : ‘13. 6 ~ ’15. 5월

- 사 업 비 : 49억 원(국비 24, 시비 17, 구비 8)

※ 기반시설(20억 원), 주차장 조성(29억 원)

- 사업방식(민관협력) : 市(기반시설 지원), 상인(빈 점포 임대), 민간(리모델링, 입점)

❍ 추진상황

- 대구시 기획 및 서부시장 선정 : ‘13. 6월,

- 사업협의체 구성 : ‘14. 1월(시, 서구청, 상인, 프랜차이즈협회)

- 점포주 동의(62개 점포) 및 입점업체 모집 : ‘13. 10월 ~ ’14. 6월

- 점포주 및 입점업체간 임대차계약 체결 : ‘14. 7월

- 안전보강 검사 : ‘14. 9월

- 기반시설 공사 : ‘14. 10월 ~ '15. 2월

* 상·하수관 정비, 전기·통신·도시가스 배선, 외벽정비

- 입점업체 내부 인테리어 공사 및 입점 : ‘15. 4 ~ 5월

❍ 프랜차이즈 특화거리는 안전보강 검사 및 기반시설 공사 등의 작업을 거쳐 2015년 5월 22일 개장식을 개최함

❏ 편의시설 설치 마무리 안 된 채 ‘졸속’ 개장

❍ 대구시에 확인 결과, 프랜차이즈 특화거리에 공용화장실 및 고객지원센터, 옥상방수, 공영주차장 등 각종 편의시설의 설치를 완료하지 않은 채 개장식을 개최한 것이 확인됨.

공 사 명(서구청시행)	계약일자	착공일자	준공일자
공용화장실 설치	·부지 매입 확보 : ‘15. 11월 ·설계용역 시행 : ‘15. 12월 ~ ’16. 2월 ·공사착공 : ‘16. 3월(예정)
고객지원센터설치	“
옥상방수공사	2015-06-23	2015-06-29	2015-10-26
공영주차장 조성	·부지보상 협의취득 : ‘15. 4월 ~ ’15. 8월 ·실시설계용역 시행 : ‘15. 8. 3 ~ ’15. 9. 21 ·공사 착공 : ‘15. 10. 15(예정)

- 공영주차장의 경우 사업 초기 단계에서는 2015년 1월에 시작, 6월까지 조성을 완료하는 것으로 계획했지만, 부지보상 문제로 인하여 추진이 지체되었고 아직까지 조성이 완료되지 못함. 10월 15일에 공사를 착공할 예정임.

- 공용화장실과 고객지원센터의 경우는 아직 부지를 확보하지도 못했고, 공사는 2016년 3월이 돼야 시작할 예정임.

- 옥상방수공사는 애초 사업계획에는 없었음. 상인들의 요구로 2015년 6월 23일에 돼서야 공사를 착공하였고 현재 공사 중임(10월 26일 완료 예정).

❍ 편의시설들의 설치가 완료되지 않은 채 개장식을 개최한 이유는 입점 점포주들의 요구에 따른 것으로, 편의시설의 설치가 완료될 때까지 개장을 연기할 경우 해당 기간 동안 영업을 하지 못해 손해가 발생하기 때문임.

❍ 노웅래 의원은 “편의시설의 설치를 조기에 마무리하고, 상인회와 협의를 통해 앞으로 발생할 수 있는 문제점에 대해 조기에 해결할 수 있도록 개선책을 마련해야 한다”고 말했다.