<국회 국토교통위원회 새누리당 이노근 의원 보도자료 : 2015년9월17일>

고속도로 영구폐쇄 구간 110km,

대부분 활용계획 없이 방치

- 영구폐쇄 교량 22개 중 5개는 10년 넘게 활용계획 없어 -

- 최근 5년간 110개공구 중 45개공구 잦은 설계변경으로 사업비 증가 -

- 영구폐쇄 사유 대부분 선형개량, 사업 추진 시 철저한 검토 필요 -

▣ 현황

0 고속도로 영구폐쇄 현황

- 현재 12개 노선 고속도로 영구폐쇄 총 길이는 110.5km

- 고속도로 영구폐쇄 110.5km 구간에 대한 완공당시 사업비 약 667억원

- 고속도로 영구폐쇄 구간이 제일 긴 노선은 영동선 28.2km(사업비 259억원), 남해선 23.1km(사업비 29억원), 호남선 19.7km(사업비 19억원) 순

- 영구 폐쇄된 고속도로를 적치장, 야적장 등으로 활용하는 경우가 많음

< 영구폐쇄 고속도로 현황 >

노선명	길이(km)	완공당시 사업비(백만원)	활용실태
경부선	17.9	1,802	적치장, 녹지대, 야적장 등
남해선	23.1	2,907	지방도연결, 녹지대 조성 등
88올림픽선	3.6	4,000	국도연결, 우회도로 및 적치장
대구포항선	0.6	17,500	사토장, 적치장 등
호남선	19.7	1,897	적치장, 농로, 부체도로 등
중부내륙선	6.3	1,841	수목식재, 적치장, 비상연결로 등
영동선	28.2	25,920	녹지대, 진입로, 농로 등
남해제1지선	1.1	133	농경지 진입로
남해제2지선	2.4	3,619	녹지대 조성
호남선의지선	3.2	289	우회도로, 적치장
중부내륙지선	4.2	1,231	적치장, 녹지대
중앙선의지선	0.2	5,597	녹지대 조성
계	110.5	66,736

0 고속도로 영구폐쇄 교량 및 활용 현황(별첨 2 참조)

- 현재 고속도로 영구폐쇄 교량은 총 22개, 길이는 총 2,725.41m

- 고속도로 영구폐쇄 교량 22개 중 5개는 약 10년 넘게 활용계획 없는 실정

- 고속도로 영구폐쇄 교량은 유지관리용 회차로, 수림대 조성, 자재적치 등으로 활용하고 있음

0 고속도로 영구폐쇄 교량 내용연수 관련 현황(별첨 2 참조)

- 교량 등과 같은 구조물의 내용연수는 보통 50년

- 현재 영구폐쇄 교량 22개 모두 50년을 채우지 못함

- 내용연수(50년)의 절반인 25년이 되지 않은 교량이 총 22개 중 15개

- 이 중 준공 이후 10년도 지나지 않아 폐쇄 된 교량이 6개

< 고속도로 영구폐쇄 교량 현황(준공 이후 10년 안에 폐쇄된 교량) >

노선	교량명	연장(m)	준공년도	공용년수	폐교년도	현상태
경부선	우천1교(서울)	25	1999	16	2006	자체활용중
경부선	우천1교(부산)	25	1999	16	2006	자체활용중
경부선	우천2교(서울)	40	1999	16	2006	자체활용 예정
서울외곽선	자유로IC Ramp-G교	90	1997	18	2006	자체활용중
남해선	압곡제2교	25	1993	22	1998	활용계획검토
남해선	승내천교	37.5	1989	26	1999	농로 활용중

▣문제점

1. 영구폐쇄 고속도로 및 영구폐쇄 교량은 예산 낭비한 꼴

- 고속도로 12개 노선 영구폐쇄 구간(총 110.5km, 완공당시 총 사업비 667억원)의 폐쇄 사유는 선형개량

- 폐교량 22개 중 준공이후 10년도 되지 않아 폐쇄한 교량이 6개

2. 영구폐쇄 된 고속도로 및 영구폐쇄 교량의 활용도 낮음

- 폐쇄된 도로와 교량을 적치장, 야적장, 녹지 등으로 사용 중

- 영구폐쇄 교량의 경우 짧게는 9년, 길게는 17년동안 뚜렷한 활용계획 없이 검토중

3. 최근 5년간 고속도로 110개공구에서 잦은 설계변경으로 공사비 증가(별첨 3 참조)

- 고속도로 설계변경은 총 110개공구에서 522차례 변경

- 설계변경으로 최초 공사비보다 증가한 공구는 총 45개공구로 41%차지

- 110개공구 중 한 공구에서 10차례 이상 설계변경한 공구 9개공구

- 설계변경을 통해 증가된 공사비 중 차이가 가장 많은 공구는 ‘울산-포항 6공구’로 7차례 설계변경, 약 414억원 증가

▣ 질의

0 고속도로 영구폐쇄 구간은 12개 노선에 총 110.5km나 됨. 영구폐쇄 이후 도로 활용을 보면 적치장, 야적장 등 낮은 수준에 불과함. 이는 막대한 사업비가 들어간 도로를 영구 폐쇄 이후 활용하지 못하고 있는 것으로 생각함. 이에 친환경적이고 건설적인 방향으로 활용해야 한다고 보는데, 견해는?

0 현재 일부에서 하고 있는 태양광 발전사업 등과 같은 다양한 활용 방안을 검토하기 바람

# 별첨 1 : 고속도로 영구폐쇄 현황

별첨 2 : 고속도로 영구폐쇄 교량 및 활용현황

별첨 3 : 최근 5년간 고속도로 설계변경 현황

# 별첨 1

1. 고속도로 영구폐쇄 현황

□ 영구폐쇄 고속도로 현황(폐도)

(도로처 한정유 차장 054-811-2513)

○ 종류별 유형별 현황(길이, 폭, 영구폐쇄 시점, 완공당시 사업비, 폐쇄 사유, 활용실태)

노선명	길이(km)	완공당시 사업비 (백만원)	현 활용실태
계	110.5	66,736
경부선	17.9	1,802	제설자재ㆍ비축자재 적치장, 녹지대, 고속도로순찰대 대기소, 녹지대 조성, 태양광 발전시설, 유지보수용 야적장, 녹지대 조성
남해선	23.1	2,907	지방도와 연결, 태양광 발전시설, 제설창고 설치 녹지대 조성
88올림픽선	3.6	4,000	국도와 연결, 유지관리용 우회도로 및 적치장
대구포항선	0.6	17,500	풍수해 대비용 사토장, 유지보수용 자재 적치장
호남선	19.7	1,897	유지보수용 자재 적치장, 농로, 부체도로, 마을 진입로
중부내륙선	6.3	1,841	수목식재, 녹지대 조성, 유지관리용 적치장, 비상연결로, 마을간 연결로
영동선	28.2	25,920	녹지대 조성, 복합휴게시설 설치, 마을 진입로, 농로, 수림대 조성, 스마트하이웨이 시험장, 녹지대 조성
남해제1지선	1.1	133	농경지 진입로
남해제2지선	2.4	3,619	녹지대 조성
호남선의지선	3.2	289	유지관리용 우회도로, 자재 적치장
중부내륙지선	4.2	1,231	유지관리용 자재 적치장, 녹지대 조성
중앙선의지선	0.2	5,597	녹지대 조성

# 별첨 2                                   < 고속도로 폐교량 및 활용 현황 >

구분	본부	지사	노선	교량명	이정	상부형식	연장 (m)	준공연도	공용연수	폐교연도	폐교사유	현상태
1	수도권	인천	서울외곽선	자유로IC Ramp-G교	72.20	STB	90.00	1997	18	2006	진출입시설개량	자체활용중 (유지관리용회차로)
2	강원	원주	영동선	가야교(강릉)	97.70	RA	14.00	1971	44	1994	확장공사	지자체 도로(농로) 활용중
3	강원	대관령	영동선	우용교	160.55	PSCI	25.00	1975	40	1999	확장공사	자체활용예정 (수림대조성)
4	대전충청	영동	경부선	우천1교(서울)	227.70	RA	25.00	1999	16	2006	확장공사	자체활용중 (태양광발전사업부지)
5	대전충청	영동	경부선	우천1교(부산)	227.70	RA	25.00	1999	16	2006	확장공사	자체활용중 (태양광발전사업부지)
6	대전충청	영동	경부선	우천2교(서울)	226.15	RA	40.00	1999	16	2006	확장공사	자체활용예정 (태양광발전사업예정부지진입도로)
7	전북	전주	호남선	만경강교(천안)	172.10	PSCI	690.00	1970	45	2000	전면개량공사	자체활용중 (신설교량점검공간등으로활용)
8	전북	전주	호남선	목단교(천안)	115.23	RA	12.00	1973	42	2004	선형개량	활용계획 검토중
9	전북	전주	호남선	목단교(순천)	115.23	RA	12.00	1986	29	2004	선형개량	활용계획 검토중
10	전북	논산	호남지선	한천육교(회덕)	33.45	PSCI	60.00	1970	45	2002	전면개량공사	자체활용중 (신설교량점검공간등으로활용)
11	전북	논산	호남지선	두계천교(휴게소)	29.86	PSCI+STB	280.00	1970	45	2012	계룡휴게소(회덕) 이전공사	자체활용중 (신설교량점검공간등으로활용)
12	광주전남	광주	호남선	영산강교(천안)	81.01	PSCI	401.05	1973	42	1999	전면개량공사	호남선광산~동광주확장시 철거예정
13	광주전남	광주	호남선	황룡강교(천안)	100.50	PSCI	186.70	1973	42	2006	신설공사	활용계획 검토중
14	광주전남	광주	호남선	황룡강교(순천)	100.50	PSCI	188.16	1986	29	2006	신설공사	활용계획 검토중
15	광주전남	순천	호남선	홍천교	29.50	RA	10.00	1973	42	1992	확장공사	지자체 도로(농로) 활용중
16	광주전남	순천	호남선	자암교	35.45	PSCI	25.00	1973	42	1995	확장공사	지자체 도로(농로) 활용중
17	광주전남	순천	남해선	묵백교	22.57	PSCI	25.00	1973	42	1992	확장공사	공사용진입도로활용중 (경전철복선화공사)
18	광주전남	순천	남해선	압곡제2교	3.90	PSCI	25.00	1993	22	1998	진출입시설개량	활용계획 검토중
19	광주전남	순천	남해선	섬진강교	31.27	PSCI	524.00	1973	42	1992	확장공사	사업계획 반영후 철거예정
20	대구경북	대구	경부선	오계2교(서울)	101.90	STI	15.00	1969	46	2006	확장공사	자체활용중 (자재적치등유지관리공간활용)
21	대구경북	대구	경부선	오계2교(부산)	101.90	STI	15.00	1969	46	2006	확장공사	자체활용중 (자재적치등유지관리공간활용)
22	부산경남	진주	남해선	승내천교	89.80	PSCI	37.50	1989	26	1999	진출입시설개량	지자체 도로(농로) 활용중

# 별첨 3                                   < 최근 5년간 고속도로 설계변경 현황 >

공 사 명	최 초 공사비	최 종 공사비	연도별 설계변경 증감액						설계변경 횟 수	설계변경 사유	비 고
			계	2010	2011	2012	2013	2014
총계(109개공구)	13,639,583	13,741,495	101,912 (0.74%)	-24	-25,064	28,075	34,010	64,916
울산-포항 6공구	117,390	158,749	41,359	-207	570	8,613	3,576	28,807	7	․양남터널 지보패턴변경(236억) ․양남터널 보강공법(176억)
삼척-동해 2공구	101,979	124,856	22,877	724	6,006	9,720	6,135	292	9	․적노1,2,3 지보패턴변경(125억) ․교량기초 석회 공동보강 등(56억)
울산-포항 10공구	107,056	123,926	16,870	1,290	5,705	5,277	2,609	1,989	5	․양북터널,진전1터널 지보패턴변경(102억) ․양북터널 저토피 보강(24억)
담양-성산 9공구	106,679	121,480	14,801	30	812	3,268	1,449	9,242	6	․절토부 암판정 결과반영(44억) ․태풍(삼바) 피해복구(23억)
울산-포항 7공구	110,842	124,619	13,777	98	5,895	611	4,947	2,226	7	․양남터널 지보패턴변경(200억)
동홍천-양양 9공구	131,644	143,088	11,444	480	3,213	5,258	728	1,765	9	․행치2터널 파쇄대 보강 등(118억) ․세골재 운반거리 변경(12억)
담양-성산 14공구	88,487	98,108	9,621	629	753	744	2,477	5,018	7	․절토부 암판정 결과반영(24억) ․교량점검시설, 졸음쉼터 등
울산-포항 3공구	93,717	101,157	7,440	368	-948	4,048	1,672	2,300	6	․중금속 관련 환경영향평가반영(39억) ․관문2터널 등 지보패턴 변경(29억)
담양-성산 3공구	82,420	89,268	6,848	618	-751	478	1,376	5,127	6	․절토부 암판정 결과반영(29억) ․기존 교량 안전성 평가결과에 따른 개축(22억) - 기존 남원교(‘84년) 상태등급 : D ․교룡산성 연결통로(21억) - 생태환경축 복원을 위한 연결통로(터널형) 추가설치(지자체요구)
주문진-속초 5공구	119,756	125,231	5,475	625	2,312	-31	3,111	-542	8	․양양1터널 보강(35억)
담양-성산 8공구	61,527	66,972	5,445	-644	40	1,451	640	3,958	6	․절토부 암판정 결과반영(22억) ․교량점검시설, 골재원 변경 등
울산-포항 8공구	98,312	103,660	5,348	359	-1,425	-356	2,550	4,220	6	․절토사면 안정성 결과반영(24억) ․안동터널 지보패턴 변경(29억)
주문진-속초 6공구	83,578	88,878	5,300	-458	-112	5,002	3,534	-2,666	7	․주봉터널 지보패턴 변경(44억) ․주봉터널 저토피 보강(27억)
동홍천-양양 8공구	105,411	110,511	5,100	2,984	-513	1,815	305	509	10	․환경영향평가 협의결과 반영(교량신설)(32억) ․세골재 운반거리 변경(16억)
울산-포항 1공구	130,637	135,437	4,800	36	-1,920	2,128	936	3,620	6	․터널 지보패턴 변경(10억) ․절토사면 보강(18억)
울산-포항 11공구	164,471	168,438	3,967	-337	-515	306	2,602	1,911	6	․터널 지보패턴 변경(43억)
울산-포항 5공구	111,242	114,930	3,688	250	-811	85	1,107	3,057	5	․절토사면 보강(10억) ․교량말뚝 수량조정(8억)
부산외곽 1공구	98,054	101,737	3,683	-	-	109	999	2,575	4	․절토사면 보강(29억)
동홍천-양양 6공구	121,747	125,047	3,300	1,266	-112	3,853	853	-2,560	10	․환경영향평가 협의결과 반영(18억) - 동물이동통로 ․장평2터널 지보패턴 변경(16억)
동홍천-양양 5공구	83,711	86,836	3,125	1,486	-46	1,416	-127	396	10	․환경영향평가 협의결과 반영(16억) - 개착터널 설치 ․세골제원 운반거리 변경(13억)
충주-제천 3공구	129,939	132,771	2,832	399	4,390	-1,174	309	-1,092	9	․삼탄3터널 붕락부 보강(48억)
담양-성산 1공구	78,484	80,951	2,467	262	847	-36	-174	1,568	7	․절토부 암판정 결과반영(16억)
부산외곽 12공구	107,784	110,159	2,375	-	-	155	1,188	1,032	3	․터널 지보패턴 변경(3억), 민원 등
양재-기흥 3공구	43,481	45,643	2,162	-	-	1,075	9	1,078	4	․현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 19공구	24,268	26,423	2,155	845	20	1,039	41	210	8	․절토부 암판정 결과반영(12억)
담양-성산 7공구	66,676	68,812	2,136	-285	530	-162	341	1,712	7	․절토부 암판정 결과반영(8억)
주문진-속초 4공구	126,818	128,725	1,907	-945	-788	2,935	251	454	7	․남대천교 연약지반 보강(10억) ․절토부 암판정 결과반영(8억)
울산-포항 2공구	102,539	104,185	1,646	604	-2,709	-69	2,301	1,519	5	․다운4터널 저토피 보강(21억)
충주-제천 2공구	116,537	117,983	1,446	-125	-297	464	1,750	-346	9	․절토부 암판정 결과반영(10억)
안산-일직 1공구	101,037	102,285	1,248	-	-111	79	590	690	5	․절토부 암판정 결과반영(6억)
동홍천-양양 13공구	88,767	89,889	1,122	991	-535	570	27	69	9	․현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 12공구	90,000	91,059	1,059	-	-1,850	-1,034	-104	4,047	6	․현장여건변동, 민원 등
대구순환 4공구	107,980	109,004	1,024	-	-	-	-	1,024	1	․현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 10공구	41,622	42,583	961	909	555	-1,383	922	-42	7	․현장여건변동, 민원 등
담양-성산 11공구	119,763	120,552	789	-415	-840	2,536	-443	-49	7	․현장여건변동, 민원 등
삼척-동해 1공구	90,081	90,831	750	-4	-1,406	2,641	123	-604	7	․현장여건변동, 민원 등
부산외곽 5공구	110,671	111,267	596	-	-	-69	544	121	3	․현장여건변동, 민원 등
담양-성산 10공구	79,640	80,083	443	-	-122	20	-87	632	6	․현장여건변동, 민원 등
부산외곽 9공구	206,660	206,911	251	-	-	-	-	251	3	․현장여건변동, 민원 등
부산외곽 8공구	144,109	144,285	176	-	-	-	-	176	3	․현장여건변동, 민원 등
부산외곽 4공구	80,839	81,000	161	-	-	-133	1,037	-743	4	․현장여건변동, 민원 등
부산외곽 6공구	120,007	120,144	137	-	-	-	-	137	3	․현장여건변동, 민원 등
언양영천 4공구	118,990	119,109	119	-	-	755	679	-1,315	3	․현장여건변동, 민원 등
언양영천 6공구	79,014	79,068	54	-	-	-100	154	-	3	․현장여건변동, 민원 등
대구순환 3공구	93,223	93,230	7	-	-	-	-	7	1	․현장여건변동, 민원 등
대구순환 2공구	210,321	210,321	-	-	-	-	-	-	1	․현장여건변동, 민원 등
밀양울산 1공구	92,029	92,029	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 2공구	108,934	108,934	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 3공구	89,654	89,654	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 4공구	90,089	90,089	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 5공구	221,162	221,162	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 6공구	230,761	230,761	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 7공구	118,874	118,874	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 8공구	65,950	65,950	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 9공구	153,439	153,439	-	-	-	-	-	-	-	-
밀양울산 10공구	162,578	162,578	-	-	-	-	-	-	-	-
화도양평 1공구	160,481	160,481	-	-	-	-	-	-	-	-
화도양평 2공구	159,430	159,430	-	-	-	-	-	-	-	-
화도양평 3공구	195,720	195,720	-	-	-	-	-	-	-	-
대구순환 5공구	101,440	101,437	-3	-	-	-	-	-3	1	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
삼척-동해 4공구	92,758	92,745	-13	-171	-277	655	-267	47	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
언양영천 2공구	99,981	99,946	-35	-	-	-18	1,083	-1,100	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
대구순환 7공구	81,654	81,619	-35	-	-	-	-	-35	1	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
부산외곽 10공구	128,028	127,988	-40	-	-	-265	2,132	-1,907	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
부산외곽 2공구	120,823	120,775	-48	-	-	-78	229	-199	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
대구순환 6공구	78,268	78,212	-56	-	-	-	-	-56	1	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
동홍천-양양 15공구	118,676	118,617	-59	-715	-825	-1,679	1,011	2,149	11	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
담양-성산 13공구	107,019	106,917	-102	717	375	88	-352	-930	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
동홍천-양양 12공구	90,768	90,527	-241	-392	578	713	303	-1,443	8	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
부산외곽 11공구	113,312	113,037	-275	-	-	-584	646	-337	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
울산-포항 9공구	112,141	111,841	-300	-1,630	646	-516	145	1,055	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 1공구	50,889	50,521	-368	104	174	-864	868	-650	5	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
언양영천 1공구	99,485	99,024	-461	-	-	-110	-211	-140	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
충주-제천 1공구	127,110	126,638	-472	-985	-1,155	-487	986	1,169	9	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
동홍천-양양 16공구	86,361	85,698	-663	9	-791	447	-645	317	11	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
담양-성산 2공구	110,195	109,514	-682	16	-522	-375	-740	939	7	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 3공구	94,475	93,779	-696	-	-1,513	67	867	-117	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
담양-성산 5공구	126,885	126,125	-760	236	-570	370	-551	-245	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
부산외곽 7공구	104,534	103,713	-821	-	-	1,120	-2,325	384	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 7공구	121,417	120,554	-863	-	1,262	-899	585	-1,811	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
대구순환 1공구	113,735	112,818	-917	-	-	-	-	-917	1	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 18공구	92,122	91,032	-1,090	-	-1,323	-802	1,226	-191	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
언양영천 5공구	129,908	128,721	-1,187	-	-	-399	-1,464	676	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
담양-성산 4공구	123,643	122,317	-1,326	-1	-132	-99	-963	-131	7	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 2공구	88,499	87,008	-1,491	-	771	319	-774	-1,807	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
울산-포항 4공구	102,884	101,260	-1,624	-1,961	266	-757	609	219	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
동홍천-양양 11공구	177,994	176,199	-1,795	-1,074	1,044	-195	-15	-1,555	10	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
담양-성산 12공구	216,806	215,009	-1,797	-7	-437	-21	-163	-1,169	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
부산외곽 3공구	96,967	95,113	-1,854	-	-	-61	449	-2,242	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 4공구	105,111	103,144	-1,967	-	305	-1,521	436	-1,187	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
충주-제천 5공구	78,799	76,808	-1,991	-694	-156	-1,977	-2,693	3,529	10	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 6공구	132,908	130,860	-2,048	-	-873	-476	-933	234	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 15공구	112,902	110,852	-2,050	-	-2,795	-1,671	336	2,080	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 11공구	137,238	135,160	-2,078	-	-1,206	232	-737	-367	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 17공구	100,571	98,277	-2,294	-	-2,055	238	676	-1,153	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 13공구	113,219	110,889	-2,330	-	-2,238	-628	-754	1,290	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
주문진-속초 7공구	82,776	80,343	-2,433	-156	-1,454	-72	-875	124	5	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
동홍천-양양 10공구	107,865	105,350	-2,515	-2,282	-1,243	180	512	318	9	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
언양영천 3공구	99,847	97,313	-2,534	-	-	-146	-3	-2,385	3	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 5공구	134,591	131,857	-2,734	-	-3,013	-432	-3,364	4,075	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 9공구	113,143	110,129	-3,014	-	-1,087	-401	-2,515	989	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 8공구	107,808	104,641	-3,167	-	-550	-2,785	-223	391	4	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
담양-성산 6공구	164,368	161,060	-3,309	36	-260	-1,511	-557	-1,017	7	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
동홍천-양양 7공구	124,370	120,450	-3,920	-1,533	-2,283	-10	440	-534	10	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 14공구	136,738	132,739	-3,999	-	-1,960	-519	-1,739	219	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
상주-영덕 16공구	133,703	126,615	-7,088	-	-3,854	-3,051	659	-842	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
영동-옥천 1공구	971,749	964,607	-7,142	-801	-2,912	111	587	-4,127	5	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
삼척-동해 3공구	114,024	106,626	-7,398	-1,146	-7,739	-376	645	1,218	6	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
충주-제천 4공구	111,049	93,845	-17,204	638	-2,305	-9,010	-5,577	-950	9	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등
동홍천-양양 14공구	501,017	481,927	-19,090	-65	-795	-5,574	-3,917	-8,739	10	․법령변경, 현장여건변동, 민원 등