	보도자료
	국회의원 김병욱 교육문화체육관광위원회, 분당을
문의) 김지호 비서관	서울시 영등포구 의사당대로 1 국회의원회관 1003호 Tel. 02-784-3670~2 Fax. 02-788-0267	제공일자 2016. 10. 3

차은택의 문화창조벤처단지 머리부터 발끝까지 의혹덩어리

국회 교육문화체육관광상임위원회 김병욱 의원(분당을)이 문화체육관광부로부터 받은 국정감사 자료에 따르면 관광상품 개발 및 관광진흥사업 등에 쓰여야할 관광진흥기금이 당초 계획에도 없는 차은택 전 문화창조융합본부장이 실질적으로 운영한 한국관광공사 서울센터의 문화창조벤처단지 조성에 80억원이 전용되었고 투입된 기금규모도 26억원에서 171억원으로 6.5배 대폭 증액된 것으로 밝혀졌다.

문체부는 2015년 3월 한국관광공사가 원주로 이전함에 따라 서울 한국관공공사 사옥을 한류관광의 중심지로 조성하기 위해 K-Style Hub 구축계획을 수립하고 2014년 국회와 협의하여 관광공사 서울사옥 전체를 신축하는 설계비 26억원을 책정하였다.

그런데 2015년 4월 문체부는 박근혜 대통령이 2015년 2월11일 문화창조융합본부 출범식에서 “문화창조융합벨트가 문화콘텐츠 산업의 중추적 역할을 할 수 있는 유기적 순환구조의 플랫폼이 될 수 있도록 지원”한 발언을 근거로 K-Style Hub 구축사업에 문화창조벤처단지 조성 사업을 추가하고 한국관광공사 신축계획을 리모델링사업으로 변경한다. 또 2015년6월30일 기재부에 2015년도 관광진흥개발기금운영계획 3차변경안 중 해외관광객유치활동사업인 K-Style Hub 구축사업 예산을 26억에서 151억으로 125억 증액 변경 신청한다. 기재부도 2015년7월1일 단 하루만에 이를 승인한다.  관광진흥기금의 용도는 관광진흥법에서 관광상품 개발, 관광 진흥사업 등으로 한정하고 있고 국가재정법 시행령 제29조에서는 예측할 수 없는 소요가 발생한 경우나 긴급한 소요가 발생한 경우, 기조사업을 보완하는 경우에 기금 세부항목의 지출금액을 변경할수 있다고 규정하고 있다. 이는 국가재정법 시행령 위반 소지가 다분하며 관광진흥법을 위반한 것이다.

이뿐 아니라 한국관광공사는 2015년5월21일 OO종합건축사사무소와 60억원 공사 규모의 한국관광공사 서울사옥 K-Style Hub 리모델링 설계용역 계약을 4억2천2백만원에 체결한다. 기재부로부터 관광진흥기금 증액 기금변경을 승인받지도 않았는데 승인을 전제로 설계계약부터 체결한 것이다. 또 한국관광공사로 교부된 관광기금 예산중 80억원을 한국콘텐츠진흥원에 다시 교부하여 문화창조벤처단지를 조성하게 하였고 이 역시 2015년 국정감사에서 명백한 관광진흥법 위반 사항이라고 지적 받았다. 차은택씨는 2015년4월3일부터 2016년4월7일까지 민관합동창조경제추진단 단장과 문화창조융합본부장을 겸직하면서 박근혜정부의 문화창조경제정책을 주도한 것으로 알려지고 있다.

문체부는 2015년7월1일 관광진흥기금 변경 후 9월24일  K-Style Hub에 한식문화시설을 설치한다는 명목으로 기재부에 관광진흥개발기금 20억원 증액을 또 다시 요청하고 기획재정부는 또 단 하루만인 9월25일 이를 바로 승인한다. 한국관광공사가 2015년9월에 작성한 ‘문화창조벤처단지 K-Style Hub 한식문화시설 조성 용역사업 과업내용서’에는 밀라노엑스포와 한식재단을 통한 한식 관련 전시콘텐츠 조사 및 활용방안을 검토하고 더 나아가 밀라노엑스포 한국관에서 사용한 콘텐츠(영상 등)·설비 등의 활용 방안을 검토하여, 발주처가 요구할 경우 적극 반영하여야 한다고 기록되어 있다. 관광공사는 2015년11월19일 시공테크와 18억9천9백만원 규모의 한식문화시설 조성 용역을 체결하였다. 2015 밀라노 엑스포 한국관은 한식을 주제로 건립 운영되었으며 시공테크는 이 행사의 전시위탁대행사였으며 차은택 전 문화창조융합본부장이 2015밀라노엑스포 한국관 전시감독이었다.

차은택 전 문화창조융합본부장 재임기간 동안 문체부와 한국관광공사는 관광과는 상관도 없는 창업사업에 관광진흥기금을 쏟아부었고 알짜배기 서울관광공사 서울사옥 17개층 중 11개층을 할애하고 여기에 관광진흥기금 80억까지 관광공사가 집행도 못하고 한국콘테츠진흥원에 재교부한 것이다. 또 한국관광공사는 2015밀라노엑스포에서 차은택씨와 시공테크가 시행한 한식문화시설 사업을 추가하기 위해 관광진흥기금을 변경한지 3개월만에 또다시 추가 변경을 진행한 것으로 의심되는 상황이다.

김병욱 의원은 “정권 막후 실세로 불리고 있는 차은택씨가 주도한 문화창조벤처단지가 머리부터 발끝까지 의혹 투성이”라며 “문화창조벤처단지 사업은 국가재정법 시행령 위반소지가 다분하며 관광진흥법 위반이 분명하기 때문에 감사원의 종합감사가 필요하며 검찰 수사까지 염두에 둬야 한다”고 지적하였다.

자료첨부

<교육문화체육관광위원회 2015결산 국회예산정책처 분석 P100~101>

<2015년 4월 K-Style Hub 구축 사업계획서>

<2015년 9월 K-Style Hub 구축 사업계획서>

<2015년도 6월30일 관광진흥개발기금운용계획 3차변경(안)협의 요청 >

<2015년도 6월30일 관광진흥개발기금운용계획 3차변경(안) 개요 변경사유 발췌>

<2015년도 7월1일 관광진흥개발기금 운용계획 변경 승인>

<2015년도 9월24일 관광진흥개발기금운용계획 5차변경(안)협의 요청>

<2015년도 9월24일 관광진흥개발기금운용계획 5차변경안 일부 발췌>

<2015년도 9월25일 2015년 관광진흥개발기금 운용계획 변경 승인>

<2015년 5월21일 한국관광공사 서울사옥 리모델링 설계용역>

<한국관광공사 서울사옥 리모델링 설계용역 과업지침서 일부 발췌>

<차은택 문화창조융합본부장 활동기간>

<2015년11월19일 문화창조벤처단지 K-style Hub 한식문화시설 조성 용역 계약서>

<2015년 9월 문화창조벤처단지 K-Style Hub 한식문화시설 조성 용역사업 과업내용서 일부 발췌>

<교육문화체육관광위원회 2015결산 국회예산정책처 분석 P100~101 자료/제공 김병욱의원>

<2015년 4월 K-Style Hub 구축 사업계획서 출처 문화체육관광부 /자료제공 김병욱 의원>

K-style Hub 구축

□ 사업목적 및 필요성

ㅇ 문화창조벤처단지

․ 정부와 민간이 공동으로 ‘문화창조융합벨트’를 통해 문화산업 생태계(기획-제작-구현-재투자)의 선순환 구조를 구축

․ 인력육성, 콘텐츠 구현과 창업, 해외진출까지 전 생태계가 동시에 실현되고 기술지원이 각 과정에 긴밀하게 연계되는 창작 네트워크 형성

․ 창작자, 투자자, 연구자, 대중 등 콘텐츠 창작 및 소비와 연계된 다양한 주체들 간 교류를 통해 아이디어 확대 및 다양화 기반 마련

ㅇ K-style hub 구축

․ 문화창조벤처단지 입주 기업이 제작한 한류콘텐츠의 소비(체험․판매) 채널 확대를 통한 문화콘텐츠산업의 생태계 지원

․ 한식, K-pop, K-드라마 등 한류체험시설 구축을 통한 한류관광활성화 및 한류의 지속적 발전 유도

□ 사업기간 : 2015년 연중

□ 소요예산 : 2,600백만원

□ 사업내용

ㅇ 총사업비 : 15,100백만원

ㅇ 사업규모 : 16,533.7㎡  (K-style hub 5,485㎡, 문화창조벤처단지 11,048.7㎡)

ㅇ 지원조건 : 보조금 정액지원(100%) (관광기금 15,100백만원)

ㅇ 보조사업자 : 한국관광공사

ㅇ 지원내용 : K-style Hub 및 문화창조벤처단지 구축 사업

ㅇ 사업예산 : 15,100백만원

사 업 명	사업예산			비 고
	‘14	‘15	증감
□ K-Style Hub 구축	-			신규
ㅇ 기본계획 연구용역	-	50
ㅇ 문화창조벤처단지 기본·실시설계	-	444
ㅇ K-Style Hub 기본·실시설계	-	382
ㅇ 내진설계비	-	218
ㅇ 내진 공사 및 설비개선공사		1,506
합 계		2,600

□ 사업내용

1) 문화창조벤처단지 기본계획 수립 (50백만원)

ㅇ 개  요 :  한국관광공사 건물을 리모델링하여 문화창조벤처단지와 K-Style Hub로 구축하기 위한 기본 운영방향 및 추진전략 제시

* 문화창조벤처단지 : 문화콘텐츠 분야 벤처·중소 제작업체 및 지원기관 집적화, 사업화를 위한 원스톱 지원 공간

* K-StyleHub 구축 : 주요 한류 콘텐츠의 체험·소비·투자까지의 선순환 구조를 제공하는 종합 한류 랜드마크 역할 수행 공간

ㅇ 연구범위 및 주요내용

- 사업환경 분석 및 추진 전략 수립

- 문화창조벤처단지 운영 계획 수립

- 문화창조벤처단지 운영 타당성 검토 및 건립 파급효과 분석

2) 문화창조벤처단지 기본·실시설계 (444백만원)

ㅇ 개    요 :  문화콘텐츠분야 벤처 및 중소제작업체 지원공간인 문화창조벤처단지 공간 구성을 위한 기본설계 및 실시설계

ㅇ 소요예산 : 444백만원×1회 = 444백만원

ㅇ 집행방법 : 한국콘텐츠진흥원 재교부를 통한 집행

* 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위 대가 기준 별표 4 요율 적용 (공사비*4.236*1.5배)

3) K-Style Hub 기본·실시설계 (382백만원)

ㅇ 개    요 :  문화창조벤처단지 내 한류체험판매공간인 K-StyleHub 공간 구성을 위한 기본설계 및 실시설계

ㅇ 소요예산 : 383백만원×1회 = 382백만원

* 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위 대가 기준 별표 4 요율 적용 (공사비*4.258*1.5배)

4) 문화창조벤처단지 내진설계비 (218백만원)

ㅇ 개    요 : 관광공사 서울사옥의 대수선을 통한 리모델링에 대비한 내진설계 및 부대비용(정밀안전진단, 내진성능평가, 구조보강설계 및 수수료 등)

ㅇ 소요예산 : 218백만원×1회 = 218백만원

5) 내진보강공사 및 설비개선공사 (1,506백만원)

ㅇ 개    요 : 사옥 내진설계에 의한 내진보강 공사, 시설 용도변경에 따른 소방설비 현행화, 시설 운영을 위한 제반 설비(기계, 전기, 통신) 부분개선

ㅇ 소요예산

- 내진보강 : 500백만원 × 1식 = 500백만원 (내진설계 결과에 따라 조정가능)

- 설비개선 : 1,000백만원 × 1식 = 1,000백만원 (소방 500,  전기·통신·설비 500)

- 공사 부대비용 : 6백만원(조달수수료, 보험료 등)

분 기	추진내용	비 고
2/4	ㅇ 문화창조벤처단지 기본운영계획 수립용역 ㅇ 문화창조벤처단지 기본 및 실시설계 ㅇ K-STYLE HUB 기본 및 실시설계 ㅇ 건축 인허가 절차 진행 및 내진설계
3/4	ㅇ 문화창조벤처단지 리모델링 공사계약 및 착공 ㅇ K-STYLE HUB 리모델링 공사계약 및 착공 ㅇ 내진보강 공사 ㅇ 각종설비개선공사 및 인테리어 공사
4/4	ㅇ 공사 준공, 사용승인 ㅇ 벤처기업 입주

□ 추진일정

□ 기대효과

ㅇ (문화창조벤처단지) 콘텐츠 분야 벤처기업 육성을 통한 문화산업 생태계의 선순환 구조 구축을 통해, 문화분야 창조경제 사업의 선도적 역할 주도

ㅇ (K-StyleHub) 공공부문 주도 체험형 문화관광시설을 구축함으로써, 외래관광객 유치 증대 및 한류목적 관광객의 만족도 제고, 재방문율 향상  기여

□ 소요예산 (세목별)

(단위:백만원)

구분	사업내용		배정요청액	잔액
민간자본보조 (4361-307-320-07)	K-style Hub 구축 (2,600백만원)	기본계획 용역	50
		기본 및 실시 설계	826
		내진 설계	200
		설계입찰비용	18
		내진보강 및 설비개선 등	1,506
합 계			2,600

□ 소요예산 (사업별)

(단위:백만원)

구 분	금 액	비 고
기본계획연구용역	50	기본계획연구용역비
소계	50
문화벤처단지 기본․실시 설계비	444	“공공발주 사업에 대한 건축사의 업무범위 대가 기준” 별표4 요율적용 (공사비*4.236*1.5배)
소계	444	* 한국콘텐츠진흥원 재교부
K-style hub 기본․실시 설계비	382	“공공발주 사업에 대한 건축사의 업무범위 대가 기준” 별표4 요율적용 (공사비*4.258*1.5배)
내진 설계비	218	시세(전문업체 견적서) 기준 조달수수료, 심사료 등 부대경비 18백만원 포함
내진보강 및 설비확충	1,506
소 계	2,106
합 계	2,600

□ 소요예산 내역 (분기별)

(단위 : 백만원)

목	세목	예산	1분기	2분기	3분기	4분기	비고 (주요내역)
민간자본보조 (4361-307-320-07)		2,600	-	1,094	1,506	-	-
계		2,600	0	1,094	1,506	0

※ 추진 일정에 따라 변경 가능

□ 보조사업추진에 따라 예상되는 수익금액 및 처리방안 : 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

수익사업내용	예상수익액	수익금 처리방안
-	-	-

<2015년 9월 K-Style Hub 구축 사업계획서 출처 문화체육관광부 /자료제공 김병욱 의원>

K-style Hub 구축

□ 사업목적 및 필요성

ㅇ 문화창조벤처단지

․ 정부와 민간이 공동으로 ‘문화창조융합벨트’를 통해 문화산업 생태계(기획-제작-구현-재투자)의 선순환 구조를 구축

․ 인력육성, 콘텐츠 구현과 창업, 해외진출까지 전 생태계가 동시에 실현되고 기술지원이 각 과정에 긴밀하게 연계되는 창작 네트워크 형성

․ 창작자, 투자자, 연구자, 대중 등 콘텐츠 창작 및 소비와 연계된 다양한 주체들 간 교류를 통해 아이디어 확대 및 다양화 기반 마련

ㅇ K-style hub 구축

․ 한식문화와 최신기술의 결합을 통해 새로운 융복합문화콘텐츠로 재해석한 전시체험시설 구축을 통해 관광활성화 및 일자리창출로 창조경제에 기여

․ 한식, K-pop  등 한류체험시설 구축을 통한 한류관광활성화 및 한류의 지속적 발전 유도

□ 사업기간 : 2015년~2016년

□ 소요예산 : 17,100백만원

□ 사업내용

ㅇ 총사업비 : 17,100백만원 (2015년도)

ㅇ 사업규모 : 16,533.7㎡  (K-style hub 5,485㎡, 문화창조벤처단지 11,048.7㎡)

ㅇ 지원조건 : 보조금 정액지원(100%) (관광진흥개발기금)

ㅇ 보조사업자 : 한국관광공사

ㅇ 지원내용 : K-style Hub 및 문화창조벤처단지 구축 사업

ㅇ 사업예산 : 17,100백만원(’15년 중)

≪ 소요예산 (안) ≫

구분	‘15 수시배정		’15 기금운용계획변경		계
	1차(‘15.4)	2차(‘15.7)	1차(‘15.7)	2차(금회)
K-Style Hub구축	10.9억원	15.1억원	125억원	20억원	171억원

사 업 명	사업예산			비 고
	‘14	‘15	증감
□ K-Style Hub 구축	-	-
○ 기본계획 연구용역	-	50		기 교부결정
○ 문화창조벤처단지 기본·실시설계	-	444
○ K-Style Hub 기본·실시설계	-	382
○ 내진설계비	-	218
○ 내진 공사 및 설비개선공사	-	1,506
○ K-StyleHub 구축	-	4,932
○ 문화창조벤처단지 시공	-	7,568
○ K-StyleHub 한식문화체험시설조성	-	2,000		금회신청액
합 계	-	17,100

□ 사업내용 (금회 교부신청 사업)

1) K-StyleHub 한식문화체험시설 조성 (2,000백만원)

ㅇ 개   요 : 외래관광객 대상 한국 식문화 전시체험 조성 (K-Style Hub 3~5층)

ㅇ 사업범위 및 주요내용

가. 한식문화시설에 대한 기본구상(안)에 의거한 기본계획 수립

- K-Style Hub 3·5층 공간구성에 따른 전시, 상업 및 부대시설 계획

- 층별 시설공간조닝에 맞는 도입시설계획 및 사업예산에 부합하는 예산계획 수립

- 전시․체험시설 등 시설물 유지·보수, 관리·운영방안 마련 등

≪ K-Style Hub 3·5층 공간 구성(안) ≫

나. 전시설계 및 건축설계(기본 및 실시설계)

○ 전시공간 컨셉에 맞는 세부 전시시설에 대한 전시설계

○ 내부 인테리어시공을 위한 기본 및 실시설계

다. 전시물 제작·설치 및 인테리어공사

○ 각 층간 공간 구획별 전시 컨텐츠(영상 소프트웨어 설치물 등)에 대한 제작 및 설치

○ 전시시설물 운영 콘텐츠 조달

○ K-Style Hub 3·5층 건축 인테리어 공사

분 기	추진내용	비 고
2/4	ㅇ 문화창조벤처단지 기본운영계획 수립용역 ㅇ 문화창조벤처단지 기본 및 실시설계 ㅇ K-Style Hub 기본 및 실시설계 ㅇ 건축 인허가 절차 진행 및 내진설계
3/4	ㅇ 문화창조벤처단지 리모델링 공사계약 및 착공 ㅇ K-Style Hub 리모델링 공사계약 및 착공 ㅇ 철거 및 내진보강 공사 ㅇ 각종설비개선공사 및 인테리어 공사 ㅇ K-Style Hub 3~5층 마스터플랜 확정 ㅇ K-Style Hub 3~5층 기본계획 수립
4/4	ㅇ K-Style Hub 3~5층 공간설계 및 콘텐츠 운영 세부계획 수립 ㅇ 제작 및 설치, 시공 - 인테리어 시공 및 전시장치물 제작설치 - K-Product, 벤처상품 확정, 운영인력 교육 등 ㅇ 임시사용승인 및 벤처기업 입주 ㅇ K-Style Hub 시운영 및 그랜드 오픈

□ 추진일정

□ 기대효과

ㅇ (문화창조벤처단지) 콘텐츠 분야 벤처기업 육성을 통한 문화산업 생태계의 선순환 구조 구축을 통해, 문화분야 창조경제 사업의 선도적 역할 주도

ㅇ (K-StyleHub) 공공부문 주도 체험형 문화관광시설을 구축함으로써, 외래관광객 유치 증대 및 한류목적 관광객의 만족도 제고, 재방문율 향상  기여

□ 소요예산 (세목별)

(단위:백만원)

구분	사업내용		배정요청액	잔액
민간자본보조 (4361-307-320-07)	K-style Hub 구축	K-StyleHub 한식문화체험시설조성	2,000
합 계			2,000

□ 소요예산 (사업별)

(단위:백만원)

구 분	금 액	비 고
K-StyleHub 한식문화체험시설조성	2,000	‣ 기본계획 수립 ‣ 인테리어 시공 ‣ 전시 미디어 H/W ‣ 특수영상 기획․연출 및 제작 ‣ 콘텐츠 라이센스료 ‣ 체험 프로그램 자재비
합 계	2,000	‘15년도 총예산 17,100백만원 (기 교부결정 15,100백만원 포함)

□ 소요예산 내역 (분기별)

(단위 : 백만원)

목	세목	예산	1분기	2분기	3분기	4분기	비고 (주요내역)
민간자본보조 (4361-307-320-07)		2,000	-	-	-	2,000	-
계		2,000	0	0	0	2,000

※ 추진 일정에 따라 변경 가능

□ 보조사업추진에 따라 예상되는 수익금액 및 처리방안 : 해당사항 없음

(단위 : 백만원)

수익사업내용	예상수익액	수익금 처리방안
-	-	-

<2015년도 6월30일 관광진흥개발기금운용계획 3차변경(안)협의 요청 출처 문체부 / 자료제공 김병욱 의원실>

<2015년도 6월30일 관광진흥개발기금운용계획 3차변경(안) 개요 변경사유 발췌 출처 : 문체부 / 자료제공 : 김병욱 의원실>

<2015년도 7월1일 관광진흥개발기금 운용계획 변경 승인 출처 : 기획재정부 / 자료제공 : 김병욱 의원실>

<2015년도 9월24일 관광진흥개발기금운용계획 5차변경(안)협의 요청 출처 문체부 / 자료제공 김병욱 의원실>

<2015년도 9월24일 관광진흥개발기금운용계획 5차변경안 일부 발췌 출처 문체부 / 자료제공 김병욱 의원실>

<2015년도 9월25일 2015년 관광진흥개발기금 운용계획 변경 승인 출처 기획재정부 / 자료제공 김병욱 의원실>

<2015년 5월21일 한국관광공사 서울사옥 리모델링 설계용역 출처 문화체육관광부 / 자료제공 김병욱 의원실>

<한국관광공사 서울사옥 리모델링 설계용역 과업지침서 일부 발췌 출처 : 문화체육관광부 / 자료제공 : 김병욱 의원실>

제1장  총 칙

1. 과업명칭

한국관광공사 서울사옥(이하‘사옥’) 리모델링 설계(기본ㆍ실시)용역

2. 과업 목적

본 설계용역은 한국관광공사 서울 사옥의 문화창조벤처단지(K-style Hub)로의 조성계획에 따라 기존 업무시설공간을 문화 및 집회시설, 판매시설 등으로 용도변경을 하고 그와 관련한 리모델링 공사를 시행하기 위한 제반조사, 설계도서 작성 및 관련 인허가를 필하는 것을 목적으로 한다.

3. 과업의 개요

가. 위    치 : 서울특별시 중구 청게천로 40 (다동 10)

나. 시설개요

건 물 명	한국관광공사 사옥
주 용 도	업무시설 외
건물규모	지하4층, 지상17층
주 구 조	철골, 철근콘크리트
대지면적	2,881.20㎡
건축면적/연면적	1,142.38㎡ / 26,652.1㎡
건폐율 / 용적률	39.649% / 642.84%
건축연도	1984년
지역·지구	일반상업지역, 미관지구, 방화지구 등
주차대수	118대 (옥내 114대, 옥외 4대)

※ 세부내용은 토지이용계획, 건축물대장 등 열람하여 참고할 것

다. 과업기간 : 계약일로부터 70일(공휴일 포함)

1) 각종 심의 및 인허가기간 포함

2) 한국관광공사(이하 “발주기관”)의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응하여야 한다.

3) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 사업 담당자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

① 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

② 기술용역계약일반조건 제24조(불가항력)

③ 기술용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

④ 기술용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

⑤ 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4) 사후설계관리업무는 설계기간에서 제외하며 사후설계 관리기간은 리모델링공사 완료시까지 임

라. 용역예정금액 : 431,000천원 (VAT포함)

1) 각종 조사비용, 보험료, 건축인․허가 수수료, 친환경관련 인증 및 에너지절약계획 관련 수수료(필요시) 등 제반 비용 포함

2) 공사비 예산범위 내에서 설계함을 원칙으로 하고 변경시의 용역비는 예산액범위 내에서 협의한다.

마. 공사예정금액 : 6,000,000천원 (VAT포함)

1) 제시된 공사비는 기존건축물 리모델링에 필요한 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경, 폐기물 처리비 및 내진보강, 인테리어 등에 대한 총 공사비이며, 또한 공사에 필요한 각종 제비용을 조사하여 공사금액에 포함하여야 한다.

2) 공사예정가격이 예산액을 초과할 수 없으나 부득이 공사비 초과 시 감독관과 협의하여 공사량을 조정하여 예산액 범위 내 조정할 수 있다.

3) 총 공사금액에 대한 각 공종별(건축, 기계, 전기, 통신 등) 내역구분에 대해서는 발주처 담당 감독관과 협의 후 작성될 수 있도록 한다.

4. 과업의 범위

가. 설계범위

- 6개 층에 대한 용도변경(기존 업무시설) 및 내부인테리어 설계

- 전체 건물에 대한 기존 설비 진단 및 개선사항 검토

- 내진설계에 따른 보강공사와 연계

- 실내 에스컬레이터 추가설치 검토(1~5층) 반영

- 기타 사옥 유지관리 상의 개선사항 검토

- 리모델링 공사과정의 사후설계관리 업무

- 구역별 별도설계(공사)사항 반영·취합 및 종합조정 등

※ 층별 구성(안)

층	층수	도입예정시설	면적(㎡)	용도
17F-7F	11	▫문화창조벤처단지 - 벤처기업 및 지원기관 입주 - 라운지, 세미나 공간, 아카데미 등	12,068	업무시설
6F-2F	5	▫K-style Hub - 한류 음식문화 밸리 - 한류관광 체험, 판매공간 - 종합관광안내 및 사무공간	5,485	체험전시시설 업무시설
1F	1	▫로비(출입구 2개소)	969	-
B1F	1	▫융복합 공연장, 시제품 시연 공간, 매표소	2,383	문화집회시설 근린생활시설
B2F-B4F	3	▫주차장 등	5,746	주차장

※층별 구성 및 도입시설, 콘텐츠 등은 조정될 수 있으며, B1F 및 7F~17F 구간은 별도 설계 및 공사 추진예정

<차은택 문화창조융합본부장 활동기간  출처 : 문화체육관광부 / 자료제공 : 김병욱 의원실>

<2015년11월19일 문화창조벤처단지 K-style Hub 한식문화시설 조성 용역 계약서 출처 : 문화체육관광부 / 자료제공 : 김병욱 의원실>

<2015년 9월 문화창조벤처단지 K-Style Hub 한식문화시설 조성 용역사업 과업내용서 일부 발체 출처 : 문화체육관광부 / 자료제공 : 김병욱 의원실>