(회관) 서울 영등포구 여의도동 의사당대로 1 국회의원회관632호  T. 02-784-4360  F. 02-788-0196

(지역) 충남 당진시 시청2로 18 스마트벽우빌딩 501호           T. 041-356-2020  F. 041-356-8088

배포일 : 2018년 10월 16일(화)	담당 : 최원석 비서관(010-5257-3702)	보도일 : 배포즉시 보도요청

국정감사 보도자료

한전, 화재위험 케이블 교체 손 놓고 있어

- 지하 공동구 비난연케이블 98%는 화재 무방비

- 비난연케이블 교체작업 계획수량 대비 20.8%에 불과

- 어기구 의원“조속한 공사로 화재사고 예방해야”

한국전력공사가 자체 시험결과를 통해 화재저항성 도료가 도포된데 불과한 지하의 전력케이블 상당수가 화재에 취약하다는 사실을 인지하고도 교체작업을 제대로 이행하지 않고 있는 것으로 드러났다.

더불어민주당 어기구 국회의원(충남 당진시)이 한국전력공사(이하 한전)로부터 제출받은 ‘2015년 ~2017년 비난연성 전력케이블 교체작업 추진현황’에 따르면 화재저항성 도료가 도포된데 불과한 비난연성 전력케이블의 교체물량은 한전 계획수량의 20.8%에 불과했다<표 1>.

2014년 10월 한전은 자체 분석결과를 통해 화재저항성 도료가 도포된 케이블이 10년을 넘기면 내구성을 유지하기가 어려워 화재에 무방비로 효과가 없다는 사실을 확인했다.

이에 한전은 2019년까지는 비난연케이블을 화재저항력이 있는 난연케이블로 전량 교체하기로 계획을 수립하고서도 예산상 문제나 시공상의 어려움 등을 이유로 제대로 이행하지 않고 있는 것이다<그림 1>.

현재 579개소 951.2c-㎞의 지하 공동구 전력케이블 중 249개소 364.7c-㎞ 전체의 38.3%가 화재저항성 도료가 도포된데 불과한 비난연 케이블이다<표 2>.

*c-㎞(서킷킬로미터): 지하 등 전선로(전선 1회선)의 수평길이, 긍장이라 지칭함.

이 중 매설한지 10년이 넘은 비난연 케이블의 비중은 98.1%에 달해 화재에 의한 대규모 정전 등 안전사고를 예방을 위해서는 케이블 교체가 시급한 상황이다<표 3>.

어기구 의원은 “밀폐된 공간인 지하의 공동구에서 화재 등 안전사고가 발생한다면 막대한 피해를 야기할 수 있다”며 “한전은 케이블 교체공사를 통한 화재사고 예방에 조속히 나서야 한다”고 말했다<끝>.

[표 1] 비난연성 전력케이블 교체사업 추진 현황(2015년부터 2017년)

(단위: c-㎞, %)

구 분	2015년	2016년	2017년	합계
계획수량*	92.0	604.3	790.5	1486.8
교체수량	58	49	202	309
계획대배추진율	63.0	8.1	25.6	20.8

*c-㎞(서킷킬로미터): 지하 등 전선로(전선 1회선)의 수평길이, 긍장이라 지칭함.

자료: 한국전력공사 제출자료 의원실재구성

[그림 1] 비난연성 전력케이블 교체계획(자료: 한국전력공사)

[표 2] 2018년 10월 현재 공동구 내 전력케이블 시공 현황

(단위: c-㎞, %)

구 분	비난연성 전력케이블	난연성 전력케이블	합계
개소	249	330	579
긍장	364.7	586.5	951.2
긍장비율	38.3	61.7	100.0

*c-㎞(서킷킬로미터): 지하 등 전선로(전선 1회선)의 수평길이, 긍장이라 지칭함.

자료: 한국전력공사

[표 3] 2018년 10월 현재 공동구 내 연소방지도료 경과연도별 현황

(단위: c-㎞, %)

구 분	0~5년	6~10년	11~15년	16~20년	21년이상	합계
개소	0	7	157	18	67	249
긍장	0	6.9	259.9	21.6	76.3	364.7
긍장비율	0	1.9	71.3	5.9	20.9	100

*c-㎞(서킷킬로미터): 지하 등 전선로(전선 1회선)의 수평길이, 긍장이라 지칭함.

자료: 한국전력공사